문서번호	건축부-20707
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		代손남기	12/17 신명승
협 조

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

천정공사(단열재 및 마감재) 관련 실정보고서 검토보고

2021. 12.

도시기반시설본부

(건   축   부)

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

천정공사(단열재 및 마감재) 관련 실정보고서 검토보고

『*****************************************************************

*********************************************

1		사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 백범로 21 (舊, 한국산업인력관리공단 )

○ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271㎡

○ 공사기간 : (3차)‘21.01.16. ~ ’22.03.14. (총차:‘19.04.15. ~ ’21.03.14.)

○ 공 사 비: (3차)금9,093,549,000원 (총차:금16,316,549,000원)

○ 시 공 사 : 혁성공영㈜, ㈜태왕이앤씨

2		추 진 경 위

○ ‘19. 04. 15. : 공사착공

○ ‘19. 05. 15. : 설계용역 준공

○ ‘19. 08. 06. : 서울창업허브단지 시험동 철거 완료

○ ‘20. 02. 20. : 골조공사 완료

○ ‘21. 12월 현재.  내·외부 마감공사 중

3		실정보고 내용

○ 실정보고 사유

1. 연결통로 천정 마감의 누락으로 주차장과 동일한 퍼라이트 뿜칠로 마감

2. 일부 천정 단열재설치로 수성페인트 마감시 마감 불량으로 퍼라이트 뿜칠로 변경

3. 천정 퍼라이트 수량 산출 오류에 의한 수량 변경

4. 우수드레인 및 골조 스라브 노출등 미관 확보를 위한 마감재 변경

5. 휀룸의 소음 경미로 천정 흡음재 삭제

6. 대형프로그램실 전기설계와 건축마감 상이로 등박스 설치

○ 검토내용

가. 공종별 변경내용

구분	당초	변경	실정보고근거	검토결과
**************	********	***************** *************	**************************************	**
	************************	*************************** ***********	********************************************	**
	********** ********	********** *****************	************************************	**
	******* ******	******* ************	*********************************************************	**
	************************* *********	************************* *******************	**********	**
****************	************** ******	************** ****************	**************** *************** ***************** ******	**
	*************** *****	**************** ***************	************** ********	**
	******* *****	******* ***************	**************** *************** *******	**
***************	********************** ****************	****** ***************	******************	**
***** ********	********** ******	********** ***************	**************	**
	********* ********	********* *****************	**************	**
	********** **********	************* ************	**************	**
	******* *********	******* ******************	*********************************************	**
******	******* ********	******* ***************	**************** *******	**
********	***** ********	***** ***************	**************** *******	**

나. 수량대비 증감표

**	**	***		***		**		**
		**	**	**	**	**	**
**************	*****************			**	*******	**	*******	**
	******************			***	*********	***	*********	**
	********	*****	*********	*****	*********	****	********	**
	*****	***	*********			****	**********	**
	***************	*****	***********	*****	***********	***	**********	**
	*****	*****	**********	*****	**********	***	*********	**
***************	************	***	*********	***	**********	***	*********	**
	*************	***	*********	***	*********	****	********	**
	*****	***	*********	***	*********	****	**********	**
****************	****************	**	*********			***	**********	**
***** ********	********	***	*********	***	*********	***	********	**
	*******	*****	**********	*****	**********	***	********	**
	****** *****			**	*********	**	*********	**
	*****	*****	**********	*****	**********	***	*********	**
******	*****	******	**********	******	**********	***	*******	**
*********	***	******	**********	******	**********	***	*******	**

다. 추정공사비

구 분		당초금액	변경금액	증감액	비 고
****	***	***********	***********	**********
	***	***********	***********	*********
	**	**********	**********	******
	***	***********	**********	**********
****		**********	**********	*********
**********		***********	***********	**********
****		**********	**********	*********
**********		***********	***********	**********
******		**********	**********	*******
**********		***********	***********	**********

4		건설사업관리자 검토의견

○  미관 확보를 위한 마감재 변경, 수량 산출 오류에 의한 수량 변경 및 전기 등 박스 설치등 도면,내역서,산출 단가의 검토를 관련 규정 및 검토근거에 의거 검토한 결과 승인하는 것이 타당 하다고 판단 됨.

5		설계자 검토의견

******************************************

6		처리의견

***********************************

붙임 : 실정보고 공문(건설사업관리단). 끝.