더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2021년 구소규모 편익시설(도로포장) 설치공사(연간단가) 설계변경(4회,정산) 시행

우리구에서 시행중인 『2021년 구소규모 편익시설(도로포장) 설치공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(4회,정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2021년 구소규모 편익시설(도로포장) 설치공사(연간단가)

2. 공사기간 : □21. 3. 31. ~ □21. 12. 31.

3. 계약금액 : 금1,273,000,000원(금일십이억칠천삼백만원)

4. 계약상대자 : 옹동건설(주) 대표 원창희

5. 설계변경 사유 : 신규공종 및 단순 시공(계약) 물량 증·감 발생

6. 설계변경 금액

[단위 : 원]

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총공사비	2,372,100,000	2,618,427,000	증) 246,327,000
도 급 비	1,273,000,000	1,505,600,000	증) 232,600,000
관 급 비	795,100,000	896,820,000	증) 101,720,000
이 전 비	304,000,000	216,007,000	감) 87,993,000

7. 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 구소규모 편익시설(도로) 설치공사, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)-1,410,958,570원

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충, 종암동 주민센터 진입로 확장, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)-12,347,430원

- 일자리경제과, 지역경제육성, 전통시장 활성화, 돌곶이시장 시설현대화 사업, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)-82,294,000원

붙임  1. 설계변경 사유서(4회,정산) 1부.

2. 설계변경(4회,정산) 내역서(구소규모편익) 1부.

3. 일상감사결과통보 1부.

4. 제비율 검증서 1부.

5. 설계변경 보고 1부.  끝.

주무관							이윤호				도로계획담당					어원철					도로과장					송승익					건설교통국장						12/17 임승락
협조자				계약담당							신정경					재무과장							고영진
시행			도로과-22489										(						)		접수												(						)
우	02848					보문로 168 성북구청 10층 도로과																/			http://www.sb.go.kr
전화		02-2241-3542							/전송			02-2241-6561					/	youknow99@seoul.go.kr													/	부분공개(5)