더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2021년 도로시설물 유지보수공사 1권역(연간단가) 설계변경(3회) 시행 및 준공기한 연기

우리부서에서 시행중인 『2021년 도로시설물 유지보수공사 1권역(연간단가)』에 대하여 다음과 같이 설계변경(3회) 시행 및 준공기한을 연기하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2021년 도로시설물 유지보수공사 1권역(연간단가)

2. 공사기간 : 2021. 3. 31. ~ 2021. 12. 31.

3. 계약금액 : **********************

4. 계약상대자 : 상록종합건설 주식회사 대표 이은경

5. 설계변경 사유

- 도로사면 정비예산(시비) 및 구 추가경정예산사업 반영 등에 따른 신규공종 및 시공(계약) 물량 증·감

6. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감		비 고
총사업비	*************	*************	*	*************
도 급 비	*************	*************	*	*************
관 급 비	***********	***********	*	***********
이 전 비	***********	***********	*	***********

7. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경	비고
준공기한	21.03.31.~21.12.31.	21.03.31.~22.03.31.

※ 준공기한 연기사유 : 동절기 제설대책 추진

8. 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 도로시설물 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는  도로관리, 과속방지턱 설치 및 도색공사, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는  도로관리, 제설대책 추진, 시설비(구비)

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 부속물관리, 도로사면 붕괴 예방을 위한 보수보강, 시설비 및 부대비, 시설비(시비 재배정)

- 재해 및 재난예방, 재난예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 사무관리비(시 재난관리기금)

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 일상감사 의견서 1부.

4. 설계변경 검토보고서 1부.

5. 계약금액 검증확인서 1부.  끝.

주무관							박철희				도로시설담당					이태기					도로과장					송승익					건설교통국장						임승락
부구청장							12/17 신상철
협조자				계약담당							신정경					재무과장							고영진
시행			도로과-22490										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168																/			http://www.sb.go.kr
전화		0222413562							/전송			02-2241-6561					/	park7258@sb.go.kr													/	부분공개(5)