문서번호	도로계획과-16262
결재일자	2021. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	광역도로계획팀장	도로계획과장		안전총괄관
김현상	황원근	권완택		전결 12/18 박진순
협 조
	예산1팀장		강인철

- 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 -

예산변경(통계목) 및 집행계획

2021.12.

안전총괄실

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 -

예산변경(통계목) 및 집행계획

제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 사업과 관련하여 효율적인 예산사용을 위해 *************************코자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵로 교차로(구룡, 월드컵3단지, 월드컵경기장 교차로)

○ 규    모 : 교차로 개선 3개소

- 구룡사거리 : 교량확장 (수색방향 폭6m, 연장 300m)

- 월드컵아파트 3단지 앞 교차로 : 신호연동

- 월드컵경기장 교차로 : 지하차도 폭 4차로, 연장 540m

○ 사업기간 : 2014.01. ~ 2022.12.

※ 구룡교 확장공사 추진으로 전체사업기간은 `23.12로(추정) 조정이 필요함

○ 사 업 비 : 77,601백만원(시비 5,601백만원, LH교통개선분담금 72,000백만원)

□ 추진경위

○ `12.12.26.	: 파주운정3지구 광역교통개선대책 변경확정(국토교통부)

○ `14.12.~`17.01. : 기본설계용역 실시

○ `17.05.~`18.05. : 실시설계용역 실시

○ `18.09.20. : 재투자심사(적정)

○ `19.08.01. : 공사 계약 및 착수

○ *************************************

□ 예산변경 사유

○ 교차로 구간 상수도관로(D1000mm) 이설공사 감리원 배치를 단축하여 **********************

- 당초 : ΄21.4.5~΄21.5.19(1.5개월 배치)

- 변경 : ΄21.4.5~΄21.5.04(1.0개월 배치)

○ *******************************

- ***********************

- *********************

□ 조치계획

○ *****************************************************************

※ 총사업비 변경없음

< 통계목 변경 계획 >

(단위 : 백만 원)

예 산 과 목				2021 예산액		변경액
정책	단 위	세 부	통계목	변경 전	변경후	증	감
** **	******* ***** *****	********* ****** ***	*	******	******	**	**
			***	******	******	**	*
			***	***	***	*	*
			*****	**	**	*	*

< 연차별 투자 내역 >

(단위 : 백만 원)

구 분		총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년
계		******	******	******	******	******
시설비	설 계 비	*****	*****	*	*	*
	공 사 비	***********	******	****** *****	******	******
감 리 비		***** ****	*****	*** ****	***	***
시설부대비		** ****	**	** ****	**	**

붙  임 : 예산변경 요청 공문 1부.  끝.