문서번호	교량안전과-19226
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	강북일반교량팀장	교량안전과장
김태형	민형일	12/17 조현석

『1종교량 보수·보강공사 건설사업관리용역』 설계변경 검토보고(총차3회 /2차1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12

안전총괄실

(교량안전과)

『『1종교량 보수·보강공사 건설사업관리용역』 설계변경 검토보고(총차3회 /2차1회)

『 1종교량 보수․보강공사 건설사업관리용역 』에 대하여 건설사업관리기술인 투입기간 조정 등에 따른 설계변경 검토 보고임.

※ 건설사업관리용역 설계변경 승인요청(제일 제2021-4312호, 2021.12.13)

1		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 1종교량 보수․보강공사 건설사업관리용역(장기계속)

○ 용 역 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외 2개사

○ 계약현황

(단위:천원)

구분	계약기간	계약금액	비 고
총 차	2020.01.02 ~ 2022.12.31	*********
2 차	2021.01.02. ~ 2021.12.31	900,000

2		검 토 내 용

○ 계약금액 조정(총차3회 및 2차1회)

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	*********	*********	********
2 차	*******	*******

○ 계약기간 변경(총차3회 및 2차1회)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	2020.01.02 ~ 2022.12.31	2020.01.02 ~ 2022.12.31	변경없음
2 차	2021.01.02 ~ 2021.12.31	2021.01.02 ~ 2021.12.31	변경없음

○ 건설사업관리기술인 투입계획 변경(총차)

구 분	담 당(분야)		당 초	변 경	비 고
특 급	책임기술인 (총 괄)	1차	2020.01.02. ~ 2020.12.31	2020.01.02. ~ 2020.12.31	1 차 준 공
		2차	2021.01.02. ~ 2021.12.31	2021.01.02. ~ 2021.12.31	2 차 준 공
		3차	2022.01.02. ~ 2022.12.31	2022.03.02. ~ 2022.12.31	투입시기 조정
고 급	분야별기술인 (토 목)	1차	2020.02.20. ~ 2020.12.31	2020.02.20. ~ 2020.12.31	1 차 준 공
		2차	2021.03.02. ~ 2021.12.31	2021.03.02. ~ 2021.12.31	2 차 준 공
		3차	2022.03.02. ~ 2022.10.31	2022.01.02. ~ 2022.12.31	투입시기 조정
중 급	분야별기술인 (토 목)	1차	2020.01.02. ~ 2020.12.31	2020.01.02. ~ 2020.12.31	1 차 준 공
		2차	2021.03.02. ~ 2021.12.31	2021.03.02. ~ 2021.12.31	2 차 준 공
		3차	2022.03.02. ~ 2022.09.30	2022.03.02. ~ 2022.12.31	투입시기 조정
중 급	분야별기술인 (토 목)	1차	-	-	1 차 준 공
		2차	2021.01.02. ~ 2021.10.31	2021.01.26. ~ 2021.09.15	2 차 준 공
		3차	2022.03.02. ~ 2022.09.30	2022.04.01. ~ 2022.08.31	투입시기 조정
중 급	분야별기술인 (안 전)	1차	-	-
		2차	-	-
		3차	-	2022.04.01. ~ 2022.11.30	안전감리 투입
중 급	분야별기술인 (도 장)	1차	2020.08.11. ~ 2020.12.10	2020.08.11. ~ 2020.12.10	1 차 준 공
		2차	2021.03.02. ~ 2021.09.30	2021.03.22. ~ 2021.11.21	2 차 준 공
		3차	2022.04.01. ~ 2022.07.31	2022.05.01. ~ 2022.11.30	투입시기 조정
초 급	분야별기술인 (토 목)	1차	2020.05.04. ~ 2020.12.31	2020.05.04. ~ 2020.12.31	1 차 준 공
		2차	2021.03.02. ~ 2021.05.31	2021.03.02. ~ 2021.05.31	2 차 준 공
		3차	2022.08.01. ~ 2022.08.31	-	투입시기 조정
초 급	분야별기술인 (전 기)	1차	2020.02.17. ~ 2020.02.28	2020.02.17. ~ 2020.02.28	1 차 준 공
		2차	2021.06.01. ~ 2021.07.30	2021.09.06. ~ 2021.10.20	2 차 준 공
		3차	2022.04.01. ~ 2022.06.30	2022.07.01. ~ 2022.07.31	투입시기 조정

○ 건설사업관리기술인 투입계획 변경(2차)

구 분	담 당(분야)	당 초	변 경	비고
특 급	책임기술인	2021.01.02. ~ 2021.12.31	2021.01.02. ~ 2021.12.31	-
고 급	분야별기술인(토목)	2021.03.02. ~ 2021.12.31	2021.03.02. ~ 2021.12.31	-
중 급	분야별기술인(토목)	2021.03.02. ~ 2021.12.31	2021.03.02. ~ 2021.12.31	-
중 급	분야별기술인(토목)	2021.01.02. ~ 2021.10.31	2021.01.26. ~ 2021.09.15	투입시기 조정
중 급	분야별기술인(도장)	2021.03.02. ~ 2021.09.30	2021.03.22. ~ 2021.11.21	투입시기 조정
초 급	분야별기술인(토목)	2021.03.02. ~ 2021.05.31	2021.03.02. ~ 2021.05.31	-
초 급	분야별기술인(전기)	2021.06.01. ~ 2021.07.30	2021.09.06. ~ 2021.10.20	투입시기 조정

○ 투입인원 변경 내역

구 분	투 입 개 월	환 산 인/월	용역금액 (천원)	증·감 (천원)	변경 사유
총 괄 (전 체)	142.70	132.0	2,470,100	130,187	- 안전관리자 추가 배치 반영 - 물가변동 금액 증가 반영
	151.59	139.0	2,600,287
금 회 (2차)	54.0	49.0	900,000	-	- 야간작업 투입, 제경비 정산 감액 - 물가변동 금액 증가 반영
	52.05	48.0	900,000

3		조 치 계 획

○ 효율적인 업무 수행을 위하여 상기 검토내용과 같이 용역 변경계약토록 조치하고자 합니다.

붙임 :  1. 관련공문(건설사업관리용역 설계변경 승인요청) 1부

2. 설계변경 내역서(총차3회)

3. 설계변경 내역서(2차1회). 끝.