코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행 및 변경계약 의뢰(한강대교 안전난간 설치공사-2차) (수정)

우리부서에 시행 중인『한강대교 안전난간 설치공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 한강대교 안전난간 설치공사-2차

2. 공사기간 : (총차) 2020. 12. 30. ~ 2021. 12. 31.

(1차) 2020. 12. 30. ~ 2021. 07. 30.

(2차) 2021. 08. 24. ~ 2021. 12. 31.

3. 계 약 자 : ***********

4. 설계변경 내역

○ 총차(2회 변경, 정산)

(단위 : 원)

***	**	**	********
****	*************	*************	*************
*****	***********	***********	*************
***	*************	*************	*************

○ 2차(1회 변경, 정산)

(단위 : 원)

***	**	**	********
****	*************	*************	*************
*****	***********	***********	*************
***	*************	*************	*************

5. 설계변경 사유 : ***********************************

6. 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 한강교량 안전난간 설치공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 변경내역서 및 제경비 검증 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	이정훈		교량관리팀장	박찬규		교량안전과장	12/17 조현석
협조자
시행	교량안전과-19230	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)