투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(월드컵공원 자연물쉼터 등 정비사업)

1. 시설과-7658(2021. 12. 16.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 알려 드리니, 계약기간 내     공사가 무위 준공될 수 있도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 건명: 월드컵공원 자연물쉼터 등 정비사업

*********************

다. 계약금액: 금166,401,800원(금일억육천육백사십만일천팔백원)

※ 정정원인행위No: 1175

라. 계약기간: 2021. 10. 28.~ 2021. 12. 20.

마. 변경내용: 계약금액 변경

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도 급 액	공급가액	151,274,364	180,690,000	29,415,636
	부가세	15,127,436	18,069,000	2,941,564
	도급공사비	166,401,800	198,759,000	32,357,200

붙임  공사변경계약서 1부.  끝.

	공원운영과장
★주무관	김호영		재무팀장	代민운기		공원운영과장	12/17 류기혁
협조자
시행	공원운영과-15568	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)