투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(한강변 보행네트워크 조성공사)

1. 기반시설과-8120호(2021.12.16.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인『한강변 보행네트워크 조성공사』애 대하여 다음과 같이 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 한강변 보행네트워크 조성공사

나. 공사규모 : 보행로 환경개선 5.6km, 연결거점 조성 9개소

다. 총공사비 : 4,909,951,110원(1차 3,185백만원, 2차 883백만원, 3차 841백만원)

라. 공사기간 : 2020. 12. 9. ∼ 2021. 12. 31.

마. 도 급 사 : 에이스건설(주) 대표 권보식 외 1

바. 설계변경 증감내역

차 수 별	구 분	공 사 비(원)			비 고
		당 초	변 경	증 (감)
총 차	공급가액	4,643,591,919	4,477,314,000	증 13,722,081
	부 가 세	446,359,191	447,731,400	증 1,372,209
	도 급 비	4,909,951,110	4,925,045,400	증 15,094,290
1 차	공급가액	2,896,001,919	2,530,179,000	감 365,822,919
	부 가 세	289,600,191	253,017,900	감 36,582,291
	도 급 비	3,185,602,110	2,783,196,900	감 402,405,210
2 차	공급가액	802,570,000	989,940,000	증 187,370,000
	부 가 세	80,257,000	98,994,000	증 18,737,000
	도 급 비	882,827,000	1,088,934,000	증 206,107,000
3 차	공급가액	765,020,000	957,195,000	증 192,175,000
	부 가 세	76,502,000	95,719,500	증 19,217,500
	도 급 비	841,522,000	1,052,914,500	증 211,392,500

사. 변경사유 : 현장여건 변화, 전문가 자문, 구조보강 및 민원사항 반영 등

아. 예산과목 : 도시경관개선, 도시공간 환경수준 향상, 한강변 보랭네트워크 조성, 시설비

및 부대비, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계변경 방침서  1부.

2. 설계변경 심의결과(서울시설공단)  1부.

3. 제비율 검증확인서(기술심사담당관)  1부.

4. 설계변경 내역서  각 1부.

5. 합의각서  1부. 끝.

	시설부장
주무관	송하연		기반시설과장	라철흠		시설부장	12/17 박상보
협조자	주무관	심정은		주무관	조승만		기획예산과장	안인숙
총무과장	정현석
시행	기반시설과-8130	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(5)