문서번호	정수시설과-3274
결재일자	2021. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		代노성제	12/20 윤준성
협 조

2021년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

설계변경 계획 보고

2021. 12.

구의아리수정수센터

2021년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

설계변경 계획 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 전기설비 유지보수 공사와 관련하여 물량 증‧감 사항 반영, 제경비 정산 등 설계변경 시행하고자 함

□ 사업개요

○ 공 사 명: 2021년 구의아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사

○ 공사기간: 2021. 4. 9. ~ 2021. 12. 31.

(총공사기간: 2021. 4. 9. ~ 2022. 3. 31.)

○ 계약금액: 금55,850,000원(총공사부기금액:67,537,090원)

○ 계 약 자: ****************

○ 공사내용: 정수센터 전기설비 정비 및 고장 발생시 긴급 보수

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 변경사유: 물량 증감사항 반영 및 제경비 정산

○ 계약금액 및 기간                                            (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
계약금액	55,850,000	55,850,000	증감없음
총공사부기금액	67,537,090	67,537,090	증감없음
공사기간	’21. 4. 9. ~ ’21. 12. 31.		변경없음
총공사기간	’21. 4. 9. ~ ’22. 3. 31.		변경없음

○ 주요 변경내용

- 공사 물량 증가: 절연전선(HFIX 2.5㎟) 등 15개 공종

- 공사 물량 감소: 접지동봉 설치(Φ16×1800L 1본) 등 222개 공종

- 기타 사항: 물량 변경에 따른 제경비 정산

□ 조치의견

○ 위 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의 결과에 따라 설계변경 시행하고자 함

○ 설계변경 심의위원회

- 개최일시 : **********************

- 장    소 : 정수시설과 사무실

- 주요 심의사항

‣설계변경의 타당성

‣제경비 산정 및 적용 적정성 여부

‣물량변동의 적정성 여부

‣각종 제반 규정 준수여부 등

- 심의 위원

구 분	직 급	성 명	비 고
위원장	******	*****
위 원	****	*****
위 원	****	*****
위 원	*****	*****
위 원	****	*****
위 원	*****	*****

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 내역 검증확인서 1부.

3. 설계변경 심의 설명서 1부.

4. 설계변경 심의 의견서(양식) 1부.  끝.