문서번호	기전과-7417
결재일자	2021. 12. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 12/20 代김흥식
협조

2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

강서도로사업소

[기  전  과]

2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사
설계변경 검토보고

2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사 관련하여 감리업체가 제출한 설계변경에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고 함

□ 관련근거

○ 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사 설계변경 요청

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE21A-12-56호(2021.12.20.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

○ 공사위치 및 내용

- 강서구 양천로 476 가양역 주변(금부빌딩 앞)

•횡단보도 신설, 신호기(차/보) 신설(연등처리)

- 강서구 강서로 406 일대(국민건강보험공단 강서지사)

•횡단보도 신설, 신호기(차/보) 신설

- 강서구 강서로 460 일대(평안빌딩)

•횡단보도 신설, 신호기(차/보) 신설

- 영등포구 선유로 146 이앤씨드림타워교차로

•대각선 횡단보도(2면) 신설, 신호등(보행등4) 신설(잔여포함)

- 영등포구 여의도동 1-1(서강대교 남단 대한민국헌정회 앞)

•횡단보도 신설, 신호기(차/보) 신설

○ 계약금액 : 114,272,300원

○ 공사기간 : 2021.9.23. ∼ 2021.12.23.

○ 계약업체 : ㈜현준이엔씨 대표 조현주

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 설계변경 사유

- 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경

- 간접노무비 및 보험료 등 제경비 정산, 폐기물처리비 반영

○ 설계변경 내용

공 종	주요 변경내용	변경금액
교통신호제어기	설치물량 감소 4(8→4)	감)953천원
교통신호등	설치물량 감소 6(18→12)	감)1,697천원
음향신호기	설치물량 감소 16(16→0)	감)5,663천원
교통신호지주	설치물량 감소 6(14→8)	감)1,480천원
신호케이블	설치물량 감소 269(519→250)	감)3,140천원
굴착 및 배관 외	설치물량 감소 106(430→324)	감)5,790천원
가로등 통합	설치물량 증가 32(14→46)	증)1,833천원
그 외 기타 공종	지주형좌대기초설치 외 22개 공종 설치물량 감소	감)6,314천원
제경비	간접노무비 및 보험료 등	감)22,031천원
합 계		감)45,236천원

※ 상세 내용 및 내역 붙임 설계변경 참조

□ 설계변경금액(총괄)

구 분	당 초	변 경	증감액
도 급 비	114,272,300원	69,036,000원	감)45,236,300원

□ 조치의견

○ 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경, 간접노무비 및 보험료 등 제경비      정산, 폐기물처리비를 반영한 감리업체 설계변경 내용이 적장하여 이를      승인하고 설계변경을 시행하고자 함

붙임  2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사 설계변경 요청 1부.  끝.