투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사 설계변경 시행

1. 기전과-7417호(2021.12.20.) 설계변경 검토보고 관련입니다.

2. 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행     하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2021.9.23. ~ 2021.12.23.

다. 계약업체 : ㈜현준이엔씨 대표 조현주

라. 설계변경금액

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	114,272,300원	69,036,000원	감)45,236,300원

마. 변경사유 : 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경, 간접노무비 및 보험료 등의 제경비         정산, 폐기물처리비를 반영한 내역의 변경

바. 예산과목 : 교통안전 시설물 관리, 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비, 시설비

붙임  1. 설계변경보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경도면 1부.

4. 계약금액조정검증확인서 1부.

5. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	호정오		기전과장	전결 12/20 代김흥식
협조자
시행	기전과-7422	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	부분공개(6)