투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	대영유비텍(주)
(경유)
제목	설계변경 승인 회신(2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사)

1. 문서번호 대영GE21A-12-56호(2021.12.20.) 설계변경 요청 관련입니다.

2. 설계변경 요청한 2021년 횡단보도 확충정비사업의 교통신호기 공사에 대하여 아래와      같이 승인하고 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등 감리업무 처리에 만전을      기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2021.9.23. ~ 2021.12.23.

다. 계약업체 : ㈜현준이엔씨 대표 조현주

라. 설계변경 승인내용

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	114,272,300원	69,036,000원	감)45,236,300원

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 12/20 代김흥식
협조자
시행	기전과-7425	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개