문서번호	정수시설과-3282
보존기간	년
결재일자	2021. 12. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
윤기영		김기윤	12/20 윤준성
협 조

2021년 구의아리수정수센터 토목·건축시설물 정비공사 설계변경(1차) 시행계획 보고

2021. 12.

구의아리수정수센터

『2021년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물 정비공사』

설계변경(1차) 시행계획 보고

『2021년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물 정비공사(장기계속공사)』시행중 발생한 계약물량의 증·감 및 신공종 발생 사항에 대하여 설계변경   시행코자 보고 드림.

1		사업현황

○ 공 사 명 : 2021년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물 정비공사

○ 공사기간 : 2021.4.6. ~ 2022.3.31.

○ 계 약 자 : ㈜부루건설 대표 노홍식

○ 계약금액 : ************

○ 공사규모

- 토공 : 콘크리트포장절단(200㎜이하)외 20종

- 구조물공 : Con’c인력비빔타설(소형구조)외 32종

- 부설공 : 잡철물 제작 설치(간단100%)외 8종

○ 작업지시 현황

- 1차 작업지시 내용 : 활성탄지 회수조 상부 미세방충망 설치 10㎡외 9건

- 2차 작업지시 내용 : 1정수장 PAHCS탱크 조적조 파손 보수 0.04㎡외 1건

- 3차 작업지시 내용 : 정수지2지 타일 붙이기 0.32㎡외 1건

- 4차 작업지시 내용 : 약품동, 여과지동 시설물 녹제거 및 도장 20㎡외 3건

- 5차 작업지시 내용 : 1정수장 여과지동 출입구 안전난간 설치외 7건

- 6차 작업지시 내용 : 염소투입동 건물 외벽 상부 목재 고정 30㎡외 5건

- 7차 작업지시 내용 : 1정수장 여과지동 환기창 방충망 설치 12개소 외 8건

- 8차 작업지시 내용 : 염소투입동 옥상 환기구 벽체 균열보수 및 미장 3개소

2		설계변경 사항

□ 주요 변경내용

○ 토공[콘크리트포장절단(200㎜이하)외 20종]

- 약품투입동, 본관 사면 목재계단 교체에 따른 토공물량 증·감

- 순찰로 콘크리트 포장에 따른 토공물량 증·감

○ 구조물공[Con’c인력비빔타설(소형구조) 외 56종]

- 아스팔트 도로 균열보수에 따른 물량 증·감 및 신공종 발생

- 약품동, 여과지동 시설물 녹제거 및 도장에 따른 시공물량 증·감 및 신공종 발생

○ 부설공[잡철물 제작 설치(간단100%)외 8종]

- 침전지, 공동구, 여과지동, 약품동 안전난간 설치에 따른 시공 물량 증감

- 1정수장 침전지 거름망 워크웨이 설치에 따른 시공 물량 증·감

□ 시공물량 증·감 등에 따른 금액변경

(단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	증·감액
1차수 금액	***********	************	***********
2차수 금액	**********	************	***********
총부기금액[도급액]	***********	***********	-

3		조치계획

○ 위 변경 내용에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고

심의 결과에 따라 설계변경 시행코자 함

○ 설계변경심의 위원회

- 일 시 : 2021. 12. 20(월) 17:10

- 장 소 : 정수시설과 사무실

- 내 용

‣ 설계변경의 타당성

‣ 제경비 산정 및 적용 적정성 여부

‣ 신규공종 단가 및 물량변동의 적정성 여부

- 위 원

구 분	직 급	성 명	비 고
위원장	정수시설과장	김 기 윤
위 원	행정주사	김 동 석
위 원	공업주사	노 성 제
위 원	공업주사	유 일 수
위 원	시설주사	이 희 점

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 심의의견서(양식) 1부.  끝.