문서번호	기전과-7459
결재일자	2021. 12. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		12/20 代김흥식
협조

『발산119 안전센터』

교통안전시설물(신호, 표지) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

강서도로사업소

(기전과)

『발산119 안전센터』

교통안전시설물(신호, 표지) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호, 표지) 원인자부담공사 공사완료 및 준공요청에 따른   준공승인 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-31962(2018.12.26.)호

재난관리과-8044(2021.12.15.)호

대영전기감GE 21C-12-42(2021.12.17.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 강서소방서 발산119안전센터 교통안전시설물 공사

원 인 자 : 강서소방서

위     치 : 강서구 강서로 329 주변

공사개요 : 교통신호기 신·이설 및 안전표지 개선

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	대영유비텍㈜	대영유비텍㈜	㈜아람에너지	지주 신설1, 이설3, 철거2본 신호등 신설2, 이설2조, 음향신호기 이설4대
표지			㈜지남개발	발광형 신설 2매

관련업체 및 주요설치 내용

공사기간 : 2021.12.09. ~ 2021.12.22.

준공검사 : 2021.12.14.

Ⅲ		검 사 내 용

준공검사일 : 2021년 12월 14일

구 분		기관(사업자)명	성 명
검 사 자		대영유비텍㈜	*****
입 회 자		대영유비텍㈜	*****
″		대영유비텍㈜	*****
″		교통관리과
″		구로경찰서 교통과
″		서울시 교통운영과
시 공 사	신 호	㈜아람에너지	*****
	표 지	㈜지남개발	*****
확 인 자		강서소방서	*****
″		강서도로사업소 기전과	*****

구 분	시 설	지적사항	보완사항	조치결과
신 호	제어기	- 제3종접지 부적정 등	- 제3종접지 재시공 등	적 정
	지 주	- 지주(P4, P7) 베이스커버 부적정	- 준공표지 부착	″
		- 통합지주 설로표찰 미설치	- 통합지주 설로표찰 설치
	음향신호기	음량 부적정(P1) 및 미동작(P2)	음향조정 및 압버튼 정비	″
		P1, P3 통합지주 안정기 미고정	통합지주 안정기 고정	″
표 지		- 준공표지 미부착	- 준공표지 부착	″

검사결과

Ⅳ		조 치 의 견

준공 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 준공승인 통보

붙임  1. 준공승인요청 및 인수인계서 1부.

2. 준공감리조서 및 준공확인서 각 1부.

3. 준공검사 지적사항 조치결과 1부.

4. 준공내역서 각 1부.

5. 준공도면 각 1부.  끝.