“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	도로관리과-25447		주무관	도로관리팀장		도로관리과장		안전교통국장
			윤태권	우한상		이한규		12/20 정제호
등록일자	2021.12.17.
결재일자	2021.12.20.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		행정국장		양미영
					재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란

『2021년 이면도로 포장공사(연간단가)』

설계변경(최종) 시행계획

	강 남 구
(		도로관리과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 • 도로열선 설치 사업 추진계획: 도로관리과-13308호(2021. 9. 8.) • 민원사항 처리 등 추가사업비 조치계획: 도로관리과-13308호(2021. 12. 8.) • 예산잔액(낙찰차액)활용계획 보고: 도로관리과-24640호(2021.12. 9.)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 실시공 물량 증․감 사항 반영에 따른 설계변경
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 일반주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

『2021년 이면도로 포장공사(연간단가)』

설계변경(최종) 시행계획

2021년 이면도로 포장공사(연간단가)와 관련하여 아래와 같이 민원 사항 처리 및 도로열선 구간 포장정비에 따른 실시공 물량 증・감 사항이 발생하여 설계변경(제2회, 최종)을 시행하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 민원사항 처리 등 추가사업비 조치계획: 도로관리과-13308호(2021. 12. 8.)

□ 예산잔액(낙찰차액)활용계획 보고: 도로관리과-24640호(2021.12. 9.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명: 2021년 이면도로 포장공사(연간단가)

□ 공사규모: 아스콘포장 A=378a, L형 측구설치 L=4,860m,

경계석 설치 L=3,560m 등

□ 공사기간: 2021. 3. 12. ∼ 12. 31.

□ 총사업비: ***********

○ *********************************************

**********************

Ⅲ		보고내용

□ 설계변경 사유

○ 민원사항 처리 등 이면도로 포장정비 물량 증·감 사항 반영

- 예산잔액(낙찰차액) 활용 계획 보고: 도로관리과-24640호(2021. 12. 9.)

○ 이면도로 도로열선 구간 포장(A=31.5a) 정비에 따른 사업비 반영

- 도로열선 설치 사업 추진계획: 도로관리과-18170호(2021. 9. 8.)

- 민원사항 처리 등 추가사업비 조치계획: 도로관리과-13308호(2021. 12. 8.)

□ 주요물량 증․감 내용

구 분	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증․감
아스콘포장	a	378	330	감)484
측구 설치	m	4,860	4,865	증)5
경계석 설치	m	3,560	4,105	증)545
빗물받이 설치	개소	282	242	감)40
과속방지턱 설치(3.6M)	개소	362	525	증)163

□ 공사비 증․감 내용

(단위: 원)

******		*********	***********	************	**
*******		*************	*************	**************
***	****	*************	*************	**************
	*****	***********	***********	*************
	*	*************	*************	*************
*****		***********	***********	***************
********		***********	***********	**************

□ 예산과목

○ 도로관리과, 도로시설관리, 도로시설물 유지관리, 이면도로유지보수공사,

시설비 및 부대비, 시설비*************

○ 도로관리과, 도로시설관리, 재해(설해)예방관리대책, 제설대책,

시설비 및 부대비, 시설비**********

Ⅳ		조치계획

□ 상기 보고내용과 같이 공종별 시공 물량 증·감사항을 반영하여「2021년 이면도로 포장공사(연간단가)」설계변경(최종) 하고자 함.

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

4. 예산잔액(낙찰차액) 사용계획 및 추가사업비 조치계획 각1부.  끝.