투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선 통신공사 준공기한 연기 계약의뢰

우리 본부에서 추진 중인 『2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선 통신공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 준공기한 연기

○ 공사개요

- 공 사 명: 2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선 통신공사

- 공사기간: 2021. 9. 27. ~ 2021. 12. 31.

- 공사금액: 금71,468,460원

- 도급업체: 주식회사 대광사업단

○ 변경사항

- 당초: 2021. 9. 27. ~ 2021. 12. 31.

- 변경: 2021. 9. 27. ~ 2022. 5. 31.

- 사유: 동절기 기온강하에 따른 공사중단(21. 12. 1.)으로 잔여 공정의 절대공기 부족

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

							공원부장
주무관							현병철			공원시설과장					양돈욱					공원부장					12/20 김상국
협조자				주무관						조승만					기획예산과장							안인숙					총무과장							정현석
시행			공원시설과-7208									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) 한강사업본부 공원시설과															/
전화		02-3780-0861						/전송			02-3780-0745					/	qudcjf8441@seoul.go.kr												/	부분공개(6)