투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선 전기공사 설계변경(1회) 및 준공기한 연기 계약의뢰

우리 본부에서 추진 중인 『2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 및 준공기한 연기 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 설계변경 및 준공기한 연기

○ 설계변경

- 공 사 명: 2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선 전기공사

- 공사기간: 2021. 9. 28. ~ 2021. 12. 31.

- 공사금액: 금74,256,520원

- 도급업체: 에스엠에스전기㈜

- 변경사유: 현장여건 변동에 따른 물량 증·감

- 변경금액

구 분		공 사 비(원)		증 감	비고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	67,505,928	70,929,082	증) 3,423,153
	부가세	6,750,592	7,092,908	342,316
	총 공 사 비	74,256,520	78,021,990	3,765,470

- 예산과목: 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 관리 및 개선, 한강공원 주차장 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 준공기한 연기

- 당초: 2021. 9. 28. ~ 2021. 12. 31.

- 변경: 2021. 9. 28. ~ 2022. 5. 31.

- 사유: 동절기 기온강하에 따른 공사중단(21. 12. 1.)으로 잔여 공정의 절대공기 부족

붙임  1. 설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 변경도면 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

							공원부장
주무관							현병철			공원시설과장					양돈욱					공원부장					12/20 김상국
협조자				주무관						조승만					기획예산과장							안인숙					총무과장							정현석
시행			공원시설과-7207									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) 한강사업본부 공원시설과															/
전화		02-3780-0861						/전송			02-3780-0745					/	qudcjf8441@seoul.go.kr												/	부분공개(6)