문서번호	문화비축기지관리사무소-7079
결재일자	2021. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
공원관리팀장		문화비축기지관리사무소장	서부공원녹지사업소장
정동열		김호석	12/21 이용우
협 조
	공원운영과장			류기혁

문화비축기지 안내동 환경개선공사 설계변경(정산) 검토보고

2021.  12.

서부공원녹지사업소

(문화비축기지관리사무소)

문화비축기지 안내동 환경개선공사 설계변경(정산) 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우리 사업소「문화비축기지 안내동 환경개선공사」와 관련하여 현장여건에 따른 일부 공종 물량변경 및 연금보험 등 사용이력이 없어 설계변경(정산)을 검토 보고 함.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 문화비축기지 안내동 환경개선공사

❍ 위    치 : 마포구 성산동 661번지

❍ 사업내용

- 여자화장실 출입구 신설 1식

- 남자화장실 입출구 창호설치 1식

- 수유실 환경개선 1식

❍ 공사기간 : 2021. 12. 06. ~ 2021. 12. 25.

❍ 도 급 자 : ****************

❍ 도 급 액 : 금21,000,000원

Ⅱ		실정 및 설계변경 검토보고

□ 타일 및 석재공사 중 점자블럭 감, 화강석 및 석재공사 증

❍ 매립형 점자블럭(300×300) 감(당초 32장→0장)

- 여자화장실 출입구 신설을 위한 타일 및 석재공사 중 매립형 점자블럭을 공종에 포함시켰으나, 안내동 주출입구에 기 설치된 점자블럭과 혼선을 야기할 수 있다는 의견이 있어 전량 감

❍ 화강석(고흥석) 및 지정석재공사 증(당초 10㎡→12.88㎡, 증2.88㎡)

- 매립형 점자블럭 감으로 인하여 화강석 및 지정석재공사 물량 증가

- 산출근거 : 0.3m×0.3m×32장 = 2.88㎡

□ 국민연금․건강보험․노인장기요양 보험료 감

❍ 공사기간이 30일 미만에는 보험 가입의무가 없음에도 도급자가 계약내역서에 보험료를 계상하고, 실제 보험가입이 되지 않아 감 조치

❍ 변경금액 : 금245,859원→0원

- 건강보험 : 금127,378원(노무비의 3.5%)

- 연금보험 : 금109,182원(노무비의 3.0%)

- 장기요양 : 금9,299원(건강보험료의 7.3%)

□ 설계변경에 따른 변경금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
도 급 액	21,000,000	20,700,000원	감300,000원

Ⅲ		향후계획

❍ 설계변경(정산) 시행

❍ 시민 안전 및 건설공사 품질향상을 위하여 현장관리 철저 등

붙임  1. 공사비 증감 대비표 1부.

2. 설계변경 사유 및 물량증감내역 1부.

3. 변경설계서(안) 1부.

4. 계약금액조정 검증(기술심사담당관) 확인서 1부.

5. 산재고용보험 가입확인서 및 안전관리비 사용내역 각 1부.  끝.