투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울역사박물관
수신	총무과장
(경유)
제목	경희궁 서월랑 보수공사 설계변경 의뢰

1. 총무과-11399호(2021.12.02.)와 관련입니다.

2. 경희궁 서월랑 보수공사에 대한 설계변경을 아래와 같이 의뢰하오니 차리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 경희궁 서월랑 보수공사

나. 공사기간 : 2021.11.26.~2021.12.25.

다. 계약업체 : ************

라. 계약금액 : **************************

마. 변경내용

▫ 변경사유 : 전문가 자문 및 관련 법규 등 반영

▫ 변경금액 : ******************************************

※************************

▫ 준공기한 : 변경없음

바. 예산과목 : 서울역사박물관 시설과, 역사와 문화유산의 계승발전, 문화재보존복원, 국가지정문화재 보수정비, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 문화본부 역사문화재과)

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경내역서 및 수량산출서 1부.

3. 합의서 1부. 끝,

							시설과장
주무관							윤여길			시설과장					12/21 최병석
협조자
시행			시설과-6173									(						)		접수											(						)
우	03177					서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관															/			www.museum.seoul.kr
전화		02-724-0123						/전송			02-724-0244					/	y2k932000@seoul.go.kr												/	부분공개(5)