문서번호	기전과-14854
결재일자	2021. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이지영		12/21 김은덕
협조

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(4회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12. 21.(화)

동부도로사업소

(기전과)

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(4회) 검토 보고

2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)와 관련 감리업체로부터 제출된 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가) 4회 설계변경 검토의견 제출   ○ ㈜협우지여엔지니어링 서교감 제21-134호(2021.12.20.)

2		사업개요

□ 사 업 명 : 2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 사업내용 : 강남구, 서초구일부 교통신호기 유지보수

□ 사업기간 : 2021. 3. 29. ~ 12. 31.

□ 계 약 자 : ㈜보원전기 대표 정혜원

□ 계약금액 : 금574,677,300원(금오억칠천사백육십칠만칠천삼백원정)

3		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 산업안전보건관리비 변경에 따른 제경비 정산

□ 제경비 정산

(단위 : 원)

구분	변경전 금액	변경후 금액	증·감		비고
산업안전보건관리비	0	2,531,968	증	2,531,968

4		설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변경전 금액	변경후 금액	증 / 감		비고
총공사비		***********	***********		-
도급비	공급가액	***********	***********		-
	부가가치세	**********	**********		-
	소 계	***********	***********		-

5		감리단 검토의견

□ 산업안전보건관리비 등 제경비 변경으로 설계변경이 필요함.

6		보고자 의견

□ 감리업체로부터 접수된 설계변경에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정한 것으로 판단되어 설계변경을 승인하고 관리단속과에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경서류 제출 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 검증 확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.