투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	『한강공원 반포열린터 조성공사』설계변경 계약의뢰

1. 생태환경과-6619(2021.12.20.)호와 관련입니다.

2. 지역 특색을 살린 다목적 이용 가능한 장소를 제공하기 위해서 시행중인『한강공원 반포열린터 조성공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 금액

┍ 당   초 : 679,247,000원

┕ 변   경 : 705,122,000원(증 25,875,000원)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
공급가액	617,497,829	641,020,000	증 23,522,171
부 가 세	61,749,782	64,102,000	증 2,352,218
도 급 비	679,247,000	705,122,000	증 25,875,000

나. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강잔디밭 조성, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 설계변경 관련 서류 1부.  끝.

							공원부장
주무관							장창수			생태환경과장					代장창수					공원부장					12/21 代양돈욱
협조자				주무관						조승만					기획예산과장							안인숙					총무과장							정현석
시행			생태환경과-6621									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)