문서번호	도로보수과-9244
결재일자	2021. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
구준서		代김영봉	12/22 장상규
협조

「2021년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사(성동2구역)」

설계변경(1차-최종) 검토 보고

2021. 12.

성동도로사업소

(도로보수과)

2021년 포장도로 정비구간 노면표시 유지보수공사(성동2구역)

설계변경(1차-최종) 검토 보고

『2021년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사(성동2구역)』 시공작업 완료에 따른 공종별 물량 증·감으로 1차(최종) 설계변경을 시행하여 포장도로 관리업무에 만전을 기하고자 함.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2021년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사(성동2구역)

○ 계 약 일 : 2021. 4. 16.

○ 공사기간 : 2021. 4. 21. ~ 12. 31.

○ 도 급 비 : *******************************

○ 시 공 자 : *****************

□ 설계변경 근거

○ 이준2021-170호(2021. 12. 20.)

- 2021년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사(성동2구역)-1차설계변경 제출건

○ 도로보수과-6362호(2021. 8. 31.)

-2021년 노후포장도로 정비공사(성동2구역) 포장정비 대상구간 추가 및 변경시행 보고

□ 설계변경 보고내용

가. 물량 변경 사유

○ 노후포장정비공사(성동2구역) 포장정비구간 변경

○ 설계물량 및 시공물량 차이로 인한 실제 공사물량 증감

나. 공사비 증·감 내역 : **************

(단위 : 원)

구 분	공사비 증․감 내역			비 고
	당초금액	변경금액	증 · 감
총 공사비	***********	***********	*************
도 급 비	***********	***********	**************
관급자재비	***********	**********	*************
이 전 비	*********		*************

다. 주요공종 물량 변경(증·감) 내역

공 종	규 격	단위	수 량(m)			비고
			당 초	변 경	증 ․ 감
5종 상온경화형	실선, 파선 횡단보도 문자·기호	m	******	******	*********
4종 융착식		m	******	******	*********
노면표시재도색		m	*****	******	*********

□ 조치의견

○ 상기와 같이 공종별물량 증·감에 대하여 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 설계변경 검토의견서(건설사업관리) 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.