문서번호	지역공동체과-4172
결재일자	2021. 12. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	지역기획팀장	지역공동체과장
김현진	권우정	12/22 최순옥

2021년 마을관리소 시범사업 지도점검 결과보고

2021. 12.

시민협력국

(지역공동체과)

2021년 마을관리소 시범사업 지도점검 결과보고

’21년 마을관리소 시범사업 추진지역의 사업 적정이행 여부 및 보조금 집행 실태 등 사업수행 전반에 대한 지도점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2021. 12. 15.(수) ~ 12. 16.(목)

- 12. 15.(수) 15시	: 강북구 삼양동 (소나무협동마을사회적협동조합)

- 12. 16.(목) 10시 30분 : 관악구 대학동 (사단법인 관악주민연대)

❍ 점검대상 : 2개 단체

연번	추진단체(대상지역)	사업기간	지원금액	추진내용
1	소나무협동마을 사회적협동조합 (강북구 삼양동)	`21.10.11. ~12.31.	22,642천원	구릉지대 마을관리소 운영
2	사단법인 관악주민연대 (관악구 대학동)	`21.10.11. ~12.31.	30,000천원	고시원·원룸촌 일대 마을관리소 운영

❍ 점검범위 : `21. 10. 11.(협약일) ~ `21. 12. 10. 기간 중 추진 사업

❍ 점검내용 : 사업계획의 적정이행여부, 보조금 집행 실태 등

❍ 점검방식 : 수행상황점검표(붙임1)에 따라 현장점검 및 회계서류 점검

점검분야	점검내용
사업 추진 상황	- 사업계획서에 따른 정상 추진 여부 - 사업계획 변경의 적정 여부 등
보조금 집행실태	- 보조금 목적 외 사용 여부 - 보조금 전용통장 및 전용체크카드 사용 여부 - 보조금관리시스템 사용의 적정 여부 - 강사수당, 회의참석수당, 원고료 등 각 항목에 따른 집행의 적정여부 - 지출결의서 및 관련 증빙서류 확인 - 기타 회계법령 및 지침 준수(원천징수 여부 등)

□ 세부점검항목

□ 지도점검내용

① 강북구 삼양동

○ 지원대상 : 소나무협동마을 사회적협동조합

○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 12./207

○ `21년 지원예산 : 22,642천원	(단위 : 원)

구분	합계	인건비	사업비	홍보비
보조금	22,642,000	7,711,200	1,4680,800	250,000
자부담	2,870,000	1,606,500	1,063,500	200,000
총 계	25,512,000	9,317,700	15,744,300	450,000

○ 예산집행현황                            (단위 : 원, `21.12.10.기준)

구분	합계	인건비	사업비	홍보비
예산총액 (보조금+자부담)	25,512,000	9,317,700	15,744,300	450,000
집행액	20,790,000	6,148,000	14,193,000	450,000
집행률	81.4%	65.9%	90.1%	100%

○ 사업추진현황                                     (`21.12.10.기준)

연번	세부사업명		목표	추진	추진율(%)
1	골목관리사 활동	골목길 순찰(청소)	25회	10회	40%
		마을길문제점 연구모임	2회	-	0%
		사업성찰과 논의	3회	-	0%
2	주거환경 개선사업	방충망 정비	5건	5건	100%
		단열용품 설치	10건	10건	100%
		잔수리(수도,전기,도배 등)	10건	4건	40%
3	방역활동	가옥내 방역	5건	3	60%
		골목길 방역	5회	6	120%
4	골목환경 개선사업	화단관리	2회	1회	50%
		무단투기지역 화단만들기	2회	1회	50%
5	안전한 마을만들기 사업 (야간 우범지대 순찰)		10회	10회	100%

② 관악구 대학동

○ 지원대상 : 사단법인 관악주민연대

○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 12.

○ `21년 지원예산 : 30,000천원	(단위 : 원)

구분	합계	인건비	사업비	홍보비
보조금	30,000,000	17,707,400	9,262,600	3,030,000
자부담	250,000	0	250,000	0
총 계	30,250,000	17,707,400	9,512,600	3,030,000

○ 예산집행현황                            (단위 : 원, `21.12.10.기준)

구분	합계	인건비	사업비	홍보비
예산총액 (보조금+자부담)	30,250,000	17,707,400	9,512,600	3,030,000
집행액	5,350,000	981,000	3,620,000	750,000
집행률	17.6%	5.5%	38.0%	24.7%

○ 사업추진현황                                     (`21.12.10.기준)

연번	세부사업명		목표	추진	추진율(%)
1	주거환경 생활편의 사업	노후주택 개선	20건	수리 1건, 청소·방역 8건	45%
2	골목환경 생활편의 사업	제설함의자 설치	5개	0개	0%
		골목길 청소관리	12회	12회	100%
3	주민공동체 네트워킹 사업	주민네트워킹 워크숍	3회	3회	100%
		민관워크숍	1회	0회	0%
		마을신문제작	1건	0건	0%
		나눔·물품함 제작·설치	1개	0개	0%
4	주민건강 생활문화 사업	건강교육	4회	5회	125%
		의료동행	20회	11회	55%
		심리상담프로그램	2회	1회	100%
		복지강좌	1회	1회	50%
		취업정보강좌	2회	2회	100%
		공예교육	2회	3회	150%
		요리강좌	3회	3회	100%

□ 지도점검사진

(사진1) 강북구 삼양동 지도점검	(사진2) 관악구 대학동 지도점검

□ 지도점검결과 : 지적사항 및 불인정사항 없음

□ 향후계획

○ 사업종료 및 정산안내	: `21. 12. 22.까지

○ 사업정산	: `21. 1. 31.까지

붙임 : 수행상황점검표 각1부.  끝.