투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	2021년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 설계변경 및 정산 시행

1. 시설과-7820(2021.12.22.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『2021년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』  설계변경 및 보험료정산을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2021.02.26. ~ 2021.12.31.

다. 도 급 자 : **********************

라. 설계변경내용 : 따로붙임

마. 설계변경(정산)내역                                       단위(원)

구 분		변경 전	변경 후	증감	비고
		금 액	금 액
총 공 사 비		108,163,200	108,450,320	증)287,120
도급비	공 사 원 가	70,983,819	70,440,000	감)543,819
	부가가치세	7,098,381	7,044,000	감)54,381
	계	78,082,200	77,484,000	감)598,200
관 급 자 재		30,081,000	30,966,320	증)885,320

바. 예산과목

- 공원운영과, 세계적인 환경생태 테마공원 육성, 산하공원 운영,

서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 시설비

붙 임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율검증, 합의서 1부.  끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	홍용현		기전시설팀장	윤상섭		시설과장	임종훈		서부공원녹지사업소장	12/22 이용우
협조자	재무팀장	代민운기
시행	시설과-7832	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	300-5560	/전송	300-5569	/	bluemoon5922@seoul.go.kr	/	부분공개(5)