투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	(주)삼풍이엔지종합건축사사무소 대표 정국한
(경유)
제목	토질조사 변경 관련 실정보고 승인

1. SPG-21-12C호(2021.12.14.)와 관련입니다.

2. 토질조사 변경 실정보고에 대하여 지반조사(2공 → 5공) 및 선박임대(3일 → 8일) 변경을 승인하오니, 추후 설계변경시 반영하여 주시고 용역 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
★주무관	전조연		치수과장	12/22 최연호
협조자
시행	치수과-7878	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 성수동1가 642-25	/
전화	3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개