투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰

우리부에서 시행 중인 「위례선 도시철도 건설공사 감독 권한 대행 등 건설사업관리용역」에 대한 계약을 아래 같이 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 위례선 도시철도 건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

나. 계 약 자 : ㈜동명기술공단 외 4개사

다. 계약금액 : 금100,000,000원 (총차: 금2,023,974,000원)

라. 용역기간 : '21.11.18.~'22.4.13. (총차: '21.11.18.~'25.9.17.)

마. 변경내용

구 분	당 초	변 경	증․감
용 역 비	100,000,000원	285,000,000원	증) 185,000,000원
용역기간	'21.11.18 ~ '22.4.13	'21.11.18 ~ '22.8.30	증) 139일

바. 변경사유 : 계약 금액 및 기간 조정에 따른 설계변경

사. 예산과목 : 도시철도 및 광역철도건설(교통개선분담금), 광역철도 건설사업(교통개선분담금), 위례선 도시철도 건설(교통개선분담금), 감리비

붙임 : 1) 용역 변경 검토보고서 1부.

2) 변경내역서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	도시철도계획부장
주무관	유용규		경전철설계과장	박범진		도시철도계획부장	12/20 정대현
협조자
시행	도시철도계획부-10067	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 10층 도시철도계획부	/
전화	02-772-7146	/전송	02-772-7304	/	k6075@seoul.go.kr	/	부분공개(5)