“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결 [2021년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)]

1. 급수운영과-20422(2021. 12. 17.)호와 관련입니다.

2.「2021년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)」건에 대하여     아래와 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 건           명 : 2021년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

(장기계속단가계약)

*******************************

다. 공 사 기 간 : 2021.  4. 19. ~ 2022.  6. 30.

- 1 차 기 간 : 2021.  4. 19. ~ 2021. 12. 31.

라. 변 경 사 유 : 계약물량 증,감 및 신규공종 발생

마. 변경 계약내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 공사기간	2021. 4. 19. ~2022. 6. 30.	2021. 4. 19. ~2022. 6. 30.	-
총 계약금액	2,063,291,400	2,063,291,400	-
1차 계약금액	1,434,235,000	1,331,407,000	감)102,828,000
2차 계약금액	629,056,400	731,884,400	증)102,828,000

바. 계약보증금 : *****

사. 도시철도채권 : *****

아. 인 지 세 : 해당없음.

자. 후속조치 : 변경계약 체결 후 발주부서 통보

붙임 : 설계변경 계약의뢰 공문 및 관련서류 각 1부.  끝.

주무관	권란연		행정관리팀장	이영경		행정지원과장	代이영경		강동수도사업소장	12/20 김명용
협조자
시행	행정지원과-18503	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51길 강동수도사업소	/
전화	02-3146-5017	/전송	02-3146-5078	/	ran1570@seoul.go.kr	/	부분공개(6)