투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(한강변 보행네트워크 조성공사 건설폐기물처리용역)

1. 기반시설과-8120호(2021.12.16.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인『한강변 보행네트워크 조성공사 건설폐기물처리용역』애 대해 다음과 같이 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 한강변 보행네트워크 조성공사 건설폐기물처리용역

나. 용역규모 : 폐콘크리트 874.88톤 외 3종 1식

다. 총용역비 : 242,472,000원

라. 용역기간 : 2021. 1. 27. ∼ 2021. 12. 31.

마. 도 급 사 : ㈜두성기업 대표 고광종

바. 설계변경 증감내역

구 분	공 사 비(원)			비 고
	당 초	변 경	증 (감)
총용역비	242,472,000	136,184,000	감 106,288,000
공급가액	220,429,091	123,803,637	감 96,625,454
부 가 세	22,042,909	12,380,363	감 9,662,546

사. 변경사유 : 한강변 보행네트워크 조성공사 철거물량 증감에 따른 폐기물처리물량 변경

아. 예산과목 : 도시경관개선, 도시공간 환경수준 향상, 한강변 보랭네트워크 조성, 시설비

및 부대비, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계변경 방침서  1부.

2. 설계변경 내역 및 합의각서  각 1부. 끝.

	시설부장
주무관	송하연		기반시설과장	라철흠		시설부장	12/20 박상보
협조자	주무관	심정은		주무관	안미희		기획예산과장	안인숙
총무과장	정현석
시행	기반시설과-8179	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(5)