“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	용역 설계변경 시행(도송수관 정밀안전진단용역)

1. 우리 본부에서 시행중인 『도송수관 정밀안전진단 용역(강서,남부) 및 (강남,강동)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 도송수관 정밀안전진단 용역(강서,남부)

도송수관 정밀안전진단 용역(강남,강동)

******************************

*************

-강서,남부지역 : *************************

-강남,강동지역 : **************************

라. 계약기간 : 2021.  4. 14. ~ 12. 21.

마. 설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	증․감
*****	*****	************	************	**********
	*****	************	************	**********

바. 설계변경 사유 : 선택과업중 강재 시험물량 감소

구 분		당 초	변 경	증․감
****	*****	***	***	*****
	*****	***	***	*****

사. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 1. 변경설계 개최결과보고. 1부.

2. 변경설계서. 1부.

3. 설계변경 심의 결과 보고서. 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

주무관	장형준		시설과장	이승우		시설관리부장	강호광		상수도사업본부부본부장	12/20 구아미
협조자	시설관리팀장	임춘길
시행	시설과-11605	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-2374	/전송		/		/	부분공개(7)