“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰-2회(2021년 등촌1동외 8개동 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2021년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회) 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2021년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속)

나. 공사개요: 당초 D=15~300㎜, L=794m

변경 D=15~300㎜, L=741m

다. 공사기간: 2021.05.19 ~ 2022.06.30.

라. 공사업체: 대의건설(주) 대표 한진숙

마. 설계변경 내역                                                      (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총 부기금액	***********	***********	*
1차수 금액	***********	***********	**************
2차수 금액	***********	***********	**************

바. 설계변경 조정 사유: 계약물량 증·감, 신규공종 반영 등

사. 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,급배수공사비,신설공사비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설설치및보수 등

붙임: 1. 설계변경 시행 1부.

2. 설계변경 및 심의위원회 개최계획 보고 1부.

3. 설계변경 심의위원회 개최결과 및 심의결과서 각 1부.

4. 설계변경 내역서 1부.

5. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	윤원영		시설안전팀장	代김남구		시설관리과장	12/21 代한규수
협조자
시행	시설관리과-24091	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-3998	/전송		/		/	부분공개(7)