문서번호	시설보수과-9574
결재일자	2021. 12. 22.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		代신동헌	12/22 차창훈
협조	주무관		김영화
	주무관		성지창

수출의다리고가보수공사 실시설계용역

(설계변경검토보고)

2021. 12.

남부도로사업소

(시설보수과)

수출의다리고가보수공사 실시설계용역

(설계변경검토보고)

「수출의다리고가 보수공사 실시설계용역」관련 용역사로 부터 교통규제심의 기간 소요에 따른 설계변경 요청서가 접수되어 검토하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 실시설계용역 용역비 변경 요청건 (‘21.12.21:서우제 2021 - 359호)

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 수출의다리고가 보수공사 실시설계 용역

○ 용역기간 : 2021. 2. 26. ~ 12. 31.

○ 용역금액 : 금49,303,000원

○ 용 역 사 : ㈜서우티이씨 대표****, ㈜케이에스이엔지 대표 ***

□ 설계변경 내용 검토

1) 용역진행률(70%) 적용

○ 엘리베이터설치관련 도로1차로 보도변경에 인한 교통규제심의 기간 소요

○ 규제심의 결과를 반영해야 함으로 용역 진행률 70% 적용

- 실시설계비 : 41,114,960원 → 28,780,472원(적용, 부가세 제외)

2) 자문비 정산

○ 자문비 정산 : 800,000원 (감)

- 당초 : 4인×100,000× 2회 = 800,000원

- 변경 : 자문회의 미실시 (디자인심의 2회 등 실시)

3) 용역비 변경 내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증,감	비고
총용역비		49,303,000	34,767,000	(감) 14,436,000	원단위절삭
도급비	공 급 가 액	44,820,991	31,606,452	(감) 13,214,539
	부가 가치세	4,482,099	3,160,645	(감) 1,321,454

□ 검토 내용

○ 수출의다리고가 엘리베이터 설치에 따른 교통 규제심의결과(차도 보도 변경)가 ’22년 1월에 통보될 예정임으로 금년예산으로 진행중인 용역비 불용되지않도록 현재 진행중인 용역은 현재시점에서 준공함이 적정한 것으로 판단 되며,

○ 자문비 변경은 자문비 사용에 따른 정산으로 감조치 함이 타당함으로 위 내용과 같이 설계 변경하여 용역 수행에 만전을 기하고자 함.

- 예산과목: 교량안전과, 교량관리, 고가차도및입체교차로관리, 수출의다리고가 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 행정사항

○ 설계변경 및 재계약 의뢰 (관리단속과)

- 설계변경 금액

· 당초 : 49,303,000원    · 변경 : 34,767,000원

붙임 : 용역사 용역비 변경요청 공문 사본 1부. 끝.