투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	『2021년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사』 변경계약 의뢰

1. 시설보수과-10516(2021.12.21.)호에 따라 우리 센터에서 시행 중인 『2021년 중랑물재생센터 준설공사(연간단가)』에 대하여 다음과 같이 변경계약 의뢰하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)

나. 도 급 자 : **************

다. 공사기간 : 2021. 10. 21. ~ 2021. 12. 27.

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증ㆍ감	비 고
****		***********	***********	**************
***	****	***********	***********	**************
	*****	**********	**********	**************
	*	***********	***********	**************

마. 설계변경 사유 : 준설공사 시공물량 증가에 따른 시공물량 변경 및 계약 금액 변경에 따른 설계변경 시행

바. 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 준설공사 합의각서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	송진수		시설보수과장	12/22 代최성일
협조자
시행	시설보수과-10534	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2687	/전송	02-2211-2579	/	jinsoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)