투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2021년 건설폐기물 수집.운반 및 처리용역-정산)

1. 2021년 예산사업으로 시행한『2021년도 건설폐기물수집운반 및 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2021년도 건설폐기물 수집·운반 및 처리용역(강서)

나. 용역개요 : 폐기물 수집운반 1,128㎡, 폐기물처리 2,575톤

다. 용역기간 : 2021. 4. 8. ~ 2021. 12. 31

라. 계약금액 : 금82,177,000원

마. 도 급 자 : ㈜씨와이환경 대표 김남순

바. 용역비 변경내역                                           (단위 : 원)

구분		용 역 비			비 고
		당 초	변 경	증·감
총 용역비		**********	**********	*************
도 급비	공급가액	**********	**********	*************
	부가가치세	*********	*********	*************
	계	**********	**********	*************

사. 설계변경 사유 : 현장별 폐기물 처리물량 증·감에 따른 계약금액 변경

아. 예산과목

**********************************************

*****************************************************

*******************************************************

*******************************

***************************************

*****************************************************

******************************************************

************************

**************************************************************************

붙임  1. 설계변경사유서 1부.

2. 설계서갑지 및 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 설계변경(정산) 방침서 1부.

5. 예산과목별(사업별) 예산지출 내역 1부.  끝.

							시설보수과장
주무관							최선보			시설보수과장					12/22 代강연홍
협조자
시행			시설보수과-5482									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동 67-1)															/			www.seoul.go.kr
전화		02-2657-7976						/전송			02-2657-7970					/	csb8601@seoul.go.kr												/	부분공개(5)