코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	고덕청정에너지주식회사
(경유)
제목	공사계획 변경신고 수리 통보(고덕 연료전지 발전사업)

1. 고덕청정에너지주식회사(2021.12.24. 공사계획변경신고서)호와 관련입니다.

2. 전기사업법 제61조(전기사업용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고) 제3항의 규정에 의거, 신고한 전력시설물 공사계획 변경신고에 대해 붙임과 같이 수리하였음을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

※ 주요 변경내용: 공사기간

(2020.10.15.~2021.12.31.에서 2020.10.15.~2023.01.31.로 변경)

붙임 : 1. 공사계획(변경)신고필증 1부
2. 공사계획(변경)신고 검토서 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							한인규			햇빛발전팀장					정삼모					녹색에너지과장					12/24 문인기
협조자
시행			녹색에너지과-29034									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)															/
전화		02-2133-3560						/전송			02-2133-1020					/	myjingjing@seoul.go.kr												/	부분공개(5)