문서번호	역사문화재과-23459
결재일자	2021. 12. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	역사문화재정책팀장	역사문화재과장
차미래	신혜숙	12/24 이희숙

서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사

설계변경 검토 및 계약 변경 계획

2021. 12.

문화본부

(역사문화재과)

「서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사」

설계변경 검토 및 계약 변경 계획

「서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사」의 설계변경 및 준공기한 연기 등 계약변경 사유 발생에 따라 변경계약을 추진하고자 함

□ 추진근거

○ 공사계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)

○ 서울시 공사계약 특수조건 제12조(설계변경 등) 및 제14조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사 자문회의 결과 보고(역사문화재과-12422호)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사

○ 계약금액: ****************************

○ 시 공 자: *******************

○ 계약기간: *************************************

****************************************************************

******************************************

*************************************************

**************************************************

	《 추 진 경 위 》
- 2018. 12.: 건물 내외 벽면·목재 균열 발생, 기둥 부식, 서까래·마루 벌어짐 확인 - 2019. 1. : 한옥119 출동 점검 결과, 우선 건물 내부 가새 설치 후 빠른 시일 내 해체수리 및 보강공사 필요 의견**************************** - 2019. 6.~ : 안전문제로 북촌 교육전시장 운영 잠정 중단 - 2020. 4.~8.: 정밀안전진단 용역 추진****************** ▸ ******************************************** - 2020. 12.~’21. 3.: 보수·보강공사 설계용역 추진***************** - 2021. 6.~ : 보수·보강공사 및 감리용역 추진*******************************

□ 설계변경 검토내용

○ 변경사유 : 현장 여건 및 전문가 자문의견 반영에 따른 물량 증감

***********************************************************************************************************************

*******************************************************************************************

○ 설계변경내역

***********************************

****************************************

공종별	변경내용	금액(원)		비고
		당초	변경
****	************************ ************************	*********	**********	**
****	******************** ***************************	*********	*	**
***	******************* *******************	*********	*********	**
*********	**************************** ******************	**********	*	**
****	*********** *****************	*********	*	**
****	********************* ********************	*	**********	**
***	************************	*********	**********	**
*****	*************************	*********	*********	**
*****	****	*******	*******	*
*********		**********	**********	**
*****	************	*********	*********	**
*****	**********************	**********	**********	**
*************		**********	**********	**
********		*********	**********	**
****************		**********	***********	**

○ 단가 적용(공사계약 일반조건 제7절)

***************************************

****************************

□ 계약 변경 추진계획

○ 변경대상: 계약기간 및 계약금액

구분	변경 전	변경 후	비고
****	************************	************************	*******
****	***********	************	*************

○ 변경사유

***********************************************************************

***************************************

□ 행정사항

********************************************************

*********************************************************************

**********************************

붙임  1. 설계변경 내역서 및 도면 각 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 및 합의각서 각 1부.  끝.