문서번호	도심권사업과-4618
결재일자	2021. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	다시세운관리팀장		도심권사업과장		균형발전기획관		균형발전본부장
조한근	代조한근		이상면		代김용학		12/27 서성만
협 조
	설비부장					김호성
	예산5팀장					박해진

세운상가군 재생사업 예산변경 사용 계획

2021. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

세운상가군 재생사업 예산변경 사용 계획

세운상가군 2단계 공공공간 조성공사와 관련 설비분야 미지급 기성금 재사고이월 불가에 따른 잔여 공사비 확보를 위해 예산변경 사용코자 함

Ⅰ		사 업 개 요

❍ 공 사 명 : 세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)

❍ 위    치 : 중구 을지로 ~ 세운상가군(삼풍상가~진양상가) ~ 퇴계로

❍ 공사기간 : ‘18.9.10. ~ ‘21.12.31.(설비분야: ‘22.1.31.)

❍ 총사업비 : 618억원

❍ 사업내용 : 보행데크 신설·정비, 공중보행교(2개소), 을지로지하도 연결통로(2개소), 큐브셀 등 거점공간 조성

Ⅱ		추 진 경 위

❍ ’15.02.25. : 세운상가 활성화 종합계획(시장 방침)

❍ ‘17.7.~’19.2. : 기본 및 실시설계 (Modo Studio + 토문건축)

❍ ’18.09.10. : 공사 착공 [건축: ~’20.5.9, 설비: ~’20.11.26]

❍ ’21.12.09. : 건축공사 준공기한 연기(’21.12.13 → ’21.12.31)

❍ ’21.12.10. : 설비공사 준공기한 연기(’21.12.17 → ’22.01.31)

❍ ’21.12.08. : 재배정 예산 변경 요청(도기본 설비부 → 도심권사업과)

************************************

❍ ’21.12.21. : 예산 재배정 협의사항 통보(도심권사업과 → 설비부)

*******************************

❍ ’21.12.24. : 예산 재배정 관련 의견 회신(설비부 → 도심권사업과)

**********************************************

Ⅲ		예산 변경 계획

□ 예산 변경 사유

❍ *******************************************************************************************************

- 세운상가군 재생사업 내 미집행 예산중 사용 가능한 예산의 변경 사용

동일 세부사업 내 편성목(통계목) 간 상호 융통 사용하는 것을 말함

※ 예산 현황(세운상가군 재생사업)

(’21.12월, 단위: 천원)

예산과목(통계목)	예산 현액	집행액	집행잔액	집행률	비고
******* ******** ********** ***********	*********	*	*********	**
*** ********** ********	*********	*********	*********	******	************
	*********	*********	*********	******	*****

※ 시설비 중 세운관리방안용역비(800백만원)가 포함됨. 건축 준공금(4,138백만원)은 준공검사후 집행(22.1월) 예정

❍ *******************

*********************************************************************************************************************

(단위 : 천원)

구분	22년도 소요예산	21년도 당해예산 (사고이월 예정)	22년도 추가 소요예산	비고
***	*********	*******	*********	****** **

□ 예산 변경 계획

○ ***************************

*******************************************

**********************************************

○ 변경내역

(단위 : 천원)

구 분	예 산 과 목				예산액	변경내역		변경후 예산액
	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
당초	***********	***** ****	********** *****	***************** ****	*********	*	*********	******
변경	*	*	**************	*******	*********	*********	*	*********

※ 예산의 변경사용 절차(‘21년 지방자치단체 예산편성 운영기준)

: 변경사용내역 작성(사업부서) ⇒ 예산부서 협의 ⇒ 실·국장 결정(사업부서) ⇒ 예산부서 통지

Ⅳ		행정사항 및 향후계획

❍ 예산 변경 요구서 통지(→예산담당관)

❍ 예산 재배정 (→도기본)

❍ 잔여공사 완료 및 설비공사 준공(‘22.1.)

붙임 1. 예산 변경 요구서 1부

2. 사업비 추가 예산 요구 공문(도시기반시설본부) 1부.  끝.