투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)	기전사업부장, 마곡사업부장
제목	교통안전시설(신호, 표지) 원인자부담공사 공기연장 승인통보 [마곡엠밸리9단지(B-10교차로)]

1. 귀 사(기관)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 교통관리과-13678(2021.06.25.)호

나. 기전사업부-4059(2021.12.07.)호

다. 마곡사업부-5001(2021.12.23.)호

라. 대영전기감 GE21C-12-43(2021.12.17.)호

마. TR-원-1211(2021.12.20.)호

3. 위 호와 관련된 『공사기간 연장 요청』에 대하여 아래와 같이 승인함을 통보합니다.

가. 공 사 명 : 강서로 및 양천로 교통안전시설 공사(마곡9단지 입구)

나. 원 인 자 : 서울주택도시공사

다. 공사장소 : 강서구 마곡동 743-9(앰밸리 9단지 앞)

라. 공사내용 : 교통신호기 위치조정 및 신설, 안전표지 개선

마. 연장사유 : 관급자재 수급 지연 및 토목공사 지연

바. 공사기간 연장내용

구 분	승인 전	승인 후	비 고
공사기간	2021.10.26.∼2021.11.30.	2019.12.05.∼2021.12.31.	32일 증

4. 감리사께서는 기간 내 공사 완료 후 준공검사 계획서를 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 감리사 검토의견서 각 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울주택도시공사 사장,대영유비텍(주) 대표,서울특별시경찰청장(교통관리과장),서울강서경찰서장(교통과장),서울특별시장(교통운영과장),(주)트레픽스 대표
주무관	이성도		기전과장	12/27 代김흥식
협조자
시행	기전과-7712	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	lsd2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)