문서번호	급수운영과-21477
결재일자	2021. 12. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
조은희		박상열	12/27 김원수
협조

『2021년 서대문구 관내 상수도공사』

기성(2회) 관리조서 검토 보고

2021. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

기성(2회) 관리조서 검토 보고

『2021년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속 단가계약)』관련으로 건설사업관리기술자로부터 제출된 기성부분 관리조서에 대한 검토결과 보고임.

※관련근거: 준공(기성2차)검사 관리조서 제출[한종서부21-6호(2021. 12. 24.)]

Ⅰ		공사 현황

○ 공 사 명 : 2021년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속 단가계약)

○ 공사기간 : 2021. 7. 8.~2022. 6. 30.

○ 공사내용 : D=15~300㎜, L=2,542m

○ 도 급 비 : **************

○ 시 공 사 : ㈜정선토건 대표 ***

○ 감 독 자 : ㈜한국종합기술 건설관리기술인 ***

Ⅱ		기성(2회) 현황

□ 기성기간 : 2021. 10. 16.~12. 15.

□ 정산개요 : D=13~500㎜, L=404m

□ 정산금액                                             (단위 : 원)

계약금액	기성금액			잔 액
	계	기 정산	금회 정산금액
*************	***********	***********	***********	***********

- 금회 지출금액

금회 정산금액	기지급 노무비 및 장비대금	금회 지출금액
***********	***********	**********

※ 기지급 노무비: ********************************

※ 기지급 장비자재대금: ********************************

- 예산과목별 금회 추산(지출)금액

예 산 과 목	금회 기성금액	기지출 노무비,장비자재대금	금회 지출(추산)액
계	***********	***********	*
상수도사업비용,영업비용,배급수공사비, 신설공사비(급수공사)	***********	***********	*
자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(장기사용 배급수관 정비)	***********	**********	**********
상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,상하수도관교체비(교체장애 수전정비)	*******	*******	*
상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비(보호통·보온재등정비)	*********	*********	*

□ 검토사항

○ 공종별 산출 적정성 여부: 적정

○ 수량 산출 적정성 여부: 적정

○ 관련사항 적정성 여부: 적정

○ 노무비(교통·안전·보행안전) 지급 적정성 여부: 적정

Ⅲ		조치 계획

○ ㈜한국종합기술의 기성 검토사항을 확인한 바, 붙임과 같이 검토내역이 타당하므로 상기와 같이 기성(2회 정산) 처리코자 함.

붙임 1.기성 내역서 1부.

2.기성검사 관리조서 1부.

3.안전원,교통정리원 적정성 검토보고 1부.  끝.