문서번호	기전과-7734
결재일자	2021. 12. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		12/27 代김흥식
협조

『영등포1-4구역』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

강서도로사업소

(기전과)

『영등포1-4구역』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 공사완료 및 준공요청에 따른 준공   승인 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-20381(2017.07.19.)호

영등포1-4조합 2021-19호(2021.11.30.)호

대영전기감GE 21C-12-57(2021.12.24.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 영등포1-4구역 도시환경정비사업 중 교통안전시설물 원인자부담공사

원 인 자 : 영등포1-4구역 도시환경정비사업조합

위     치 : 영등포구 국회대로54길 10 일원

공사개요 : 교통신호기 신설

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜동림티엔에스	대영유비텍㈜	㈜덕우종합전기건설	제어기 신설 3대 지주 신설 10본 신호등 신설 16조 음향신호기 신설 6대

관련업체 및 주요설치 내용

공사기간 : 2018.05.25. ~ 2021.11.30.

준공검사 : 2021.04.13.

준공지연사유 : 음향신호기 기능검사 지연

Ⅲ		검 사 내 용

준공검사일 : 2021년 04월 13일

구 분	기관(사업자)명	성 명
검 사 자	대영유비텍㈜	*****
입 회 자	대영유비텍㈜
″	교통관리과
″	영등포경찰서 교통과
″	서울시 교통운영과
″	영등포 1-4구역 조합	*****
시 공 사	㈜덕우종합전기건설	*****
확 인 자	강서도로사업소 기전과	이 성 도

구 분	시 설	지적사항	보완사항	조치결과
한강성심병원	제어기	- 통신불량	제어기 교체	적 정
	지 주	P2 부착대 부착 부적정	- P2 부착대 볼트 조임	″
		P3 오염(낙서)	P3 도색	″
	맨 홀	H2 맨홀 단차	H2 맨홀 뚜껑 교체	″
대림아크로타워	음향신호기	설치기준 부적정(P2)	- 지주 이설(P2)	″
영등포교회	제어기	통신불량	- 제어기 교체	″
	지 주	P2 홀마감 부적정	P2 홀마감	″
	보 도	P2 보도복구 부적정	P2 보도 재복구	″
공 통	제어기	외함 접지 미설치 등	- 외함 접지 설치 등	″
	음향신호기	음향신호기 미설치	음향신호기 설치	″
	맨 홀	보도복구 부적정 등	보도 재복구 등	″

검사결과

Ⅳ		조 치 의 견

준공 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 준공승인 통보

붙임  1. 준공승인요청 및 시설물 인수인계서 1부.

2. 준공감리조서 및 준공확인서 1부.

3. 준공검사 지적사항 조치결과 1부.

4. 준공내역서 1부.

5. 준공도면 1부.  끝.