문서번호	정수과-12834
결재일자	2021. 12. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		代정승경	12/27 조성태
협 조

유해화학물질 취급시설

화학사고예방관리계획서 도서작성 용역 계획

2021. 12.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

유해화학물질 취급시설

화학사고예방관리계획서 도서작성 용역 계획

유해화학물질 취급시설 화학사고예방관리계획서를 작성‧제출하여 안전성을 확보하고 사고 시 피해를 최소화 할 수 있도록 비상대응체계를 구축·운영코자 함

□ 관련근거

○ 「화학물질관리법」개정(’21.4.1.시행)으로 기존의 장외영향평가와 위해관리계획이 화학사고예방관리계획서로 통합됨

※ 암사아리수정수센터 추진경과

- 유해화학물질 화학사고 장외영향평가서 적합 통보일 : 2017.3.3

- 사고대비물질 취급시설 위해관리계획서 적합 통보일 : 2017.3.17.

○ 「화학물질관리법」제23조 및 같은법 시행규칙 제19조

- 유해화학물질 취급시설 설치·운영시 5년마다 화학사고예방관리계획서를 작성 환경부에 제출(최초 위해관리계획서 제출하여 적합통보를 받은 날부터 5년 이내(2022.3.16.까지) 화학사고예방관리계획서 제출해야 함)

- 화학사고예방관리계획서 작성·제출 추진절차(제출기관 : 화학물질안전원)

계획서 작성 (신청)	→	접 수	→	검토(심사) (30일이내)	→	수정·보완 (30일이내)	→→	적합여부 통보 (검토결과서)
암사정수센터		화학물질안전원		화학물질안전원		암사정수센터		화학물질안전원

※ 화학사고예방관리계획서 작성 대상물질 및 작성 수준·내용

- 대상물질 : 액체염소, 가성소다, 과산화수소

- 작성수준 : “1군 사업장”

※ 1군사업장 : 상위규정수량 이상, 2군사업장 : 하위규정수량이상 상위규정수량 미만

구 분	하위규정수량	상위규정수량	암사정수센터 최대보유량	약품별 분류	암사정수센터 분류
염 소	4톤	20톤	110톤	1군 사업장	1군 사업장 (한물질이라도 1군 해당인 경우 1군으로 분류)
과산화수소	5톤	200톤	30.56톤	2군 사업장
수산화나트륨	400톤	-	1760.62톤	2군 사업장

- 주요작성내용 : 기본정보, 시설정보, 장외평가정보, 사전관리방침, 내·외부비상대응계획

□ 추진계획

○ 용 역 명 : 유해화학물질 취급시설 화학사고예방관리계획서 도서 작성 용역

○ 용역기간 : 2022. 1월. ~ 2022. 7월(적합 통보일까지)

(화학사고예방관리계획서 제출기한 : 2022.3.16.까지)

○ 용역대상

- 암사아리수정수센터 유해화학물질 취급시설

구 분	시설명	시 설 용 량		용 도
1정수장	가성소다 (NaOH)	저장	200㎥×2기(가성소다50%)	pH조절
		사용	200㎥×4기(가성소다20%) 10㎥×4기(NaOH 20%) 12㎥×1기(희석조)
	염소	저장	78톤 ※취수장 염소배관 연결(사용)	소 독
		중화	12㎥×1기(가성소다20%)
2정수장	가성소다 (NaOH)	저장	45㎥×1기(가성소다50%)	pH조절
		사용	45㎥×2기(가성소다20%) 4.5㎥×1기(가성소다20%) 10㎥×1기(희석조)
	염소	저장	32톤	소 독
		중화	12㎥×1기(가성소다20%)
통 합	과산화수소	7.5톤 × 4기		산화제 / 잔류오존처리

○ 용역내용 (과업지시서 별첨)

- 화학사고예방관리계획서 도서 작성

▹유해화학물질 취급시설 화학사고예방관리계획서 관련 법규에 따라 도서 작성

▹유해화학물질의 유해성 및 취급수량 등에 따른 작성내용에 따라 자료작성

- 현장심사 컨설팅

▹도서 제출 후 보완·조정사항 발생 시 추가 작성

▹화학물질안전원의 현장심사시 참여 및 컨설팅

○ 시행자 선정

- 계약방법 : 수의계약

※ 관련근거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목(추정가격 2천만원 이하 용역)

- 계약상대자

▹ 상    호 : 현ENG(대표 : 이성규)

▹ 주    소 : 경기도 화성시 동탄대로 635, SH스퀘어1차 1313호

▹ 연 락 처 : ☏ 031-374-7440

▹ 선정사유 : 다수의 유해화학물질 취급시설에 대한 현장컨설팅 실적이 있는 업체로 최저가 견적제출

□ 행정사항

○ 소요예산 : 19,800천원

- 화학사고예방관리계획서 작성 컨설팅 용역 : 19,800천원

▹예산과목 : 정수비, 수선유지교체비(수선유지비), 정수장시설보수

○ 추진일정

- 용역 발주 및 계약 : 2022. 1.

- 용역 시행(도서 작성 및 제출) : 2022.1.~2022.3.16.

- 도서보완 및 현장심사(화학물질안전원) : 2022.3.~2022.6.

- 용역 준공 : 2022.7.

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 산출기초조사서 1부. 끝.