문서번호	급수운영과-25000
결재일자	2021. 12. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
강환희	문병희	성기선	12/27 박기용
협 조

「공사명 : 2021년 2차 고척1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

2021년 장기계속 단가계약 추가 발주계획

2021. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

「공사명 : 2021년 2차 고척1동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

2021년 장기계속 단가계약 추가 발주계획

2021년 구로구관내(고척1동외 7개동) 지역에서 발생되는 각종 상수도공사(급수공사 및 교체장애 수전정비, 블록고립 불용관정비, 유수장애 이설 및 블록단위 배급수관 정비공사 등) 에 대한 시공 물량 증가에 따른 계약금액 조기소진이 예상되어 신속한 민원 처리를 위해 추가 발주 시행코자 함

Ⅰ		관련근거

□ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 제24ㆍ25조(단가계약)

□ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 제23조(예산배정 전의 계약체결)

□ 본부장방침: 경리과-2125(2006.03.17)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명: 2021년 고척1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 공사위치: 고척1동외 7개동지역

□ ****

- **************************

□ 계악금액: 694,545,490원

□ 공사기간: 2021.4.1. ~ 2022.6.30.

Ⅲ		추가 발주 사유

□ 당초 발주시 최근 3년간 물량 평균을 산출 하였으나, 금년도 대형 유량계실 설치(D700) 및 대형 아파트단지 신설(2,205세대)등 시공물량의 급격한 증가로 인하여 평년대비 2차수계약 잔액이 부족한 실정임.

□ 2차 기성 이후 잔액이 2차수 계약기간(’22.1.~6.)내 예상 시공 금액보다 작아 계약기간내 조기 소진될 것으로 예상됨.

- 정산현황

(단위: 원)

도급액	정산금액			잔액
	계	1차	2차 (2021.12.시행)
694,545,490	590,436,000	298,974,500	291,461,500	104,109,490

- 최근 3년(2019~2021)간 1월~6월 작업지시 건수 및 예상 금액

(단위: 원)

구분	신설	개량	예상금액	비고
2019	104	44		작업지시 건당 3,000천원 계산
2020	75	51
2021	71	87
3년 평균	83	60	429,000,000

※ 2022년 2월중 계약금액 소진될것으로 예상됨.

Ⅳ		공사 발주계획

□ 예정물량 및 집행 예정금액 산출

- 장기계속공사 절차에 따라 설계내역서의 예정물량은 3년치(’18년~’20년) 물량

평균의 50% 물량으로 산출

□ 2022년도 상수도 기본일위대가표 배포일이 ’22년 2월초로 예상됨에 따라 중단없는 공사 시행을 위하여 1월중 계약 완료될수 있도록 21년도 기본일위대가에 노임, 유류 등 단가 최신화 하여 발주시행

□ 계약심사 제외대상 사업으로 계약심사 미실시

- 시 계약심사과 심사대상에서 한시적으로 제외됨(2021년 급수공사, 긴급누수복구, 포장도로 굴착복구공사)

※ 계약심사과-19980(’20.12.22.)

- 계악심사 실익이 없는 매년 반복 시행 단순공사로, 본부 계약심사없이 계약의뢰 진행

※ 안전조사과-759(2021.1.20.)

□ 발주내용

- 공 사 명 : 2021년 2차 고척1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

- ******************************

- 공사기간: 착공일로부터 2022. 6. 30일 까지

- 계약방법: 제한경쟁입찰(지역제한)

- 예산현황

***	****	***	***	****** **	***	**
*	***********	***********	**********	***********	***********

□ 계약기간(총 부기기간) : 착공일로부터 2022.6.30. 까지

□ 입찰 및 계약: 입찰은 총 예정수량을 기준으로 표시함

Ⅴ		기타 행정사항

□ 경제활력 제고 및 서민생활 안정화를 위하여 행정안전부 「2021년 지방재정 신속집행 추진계획(행정안전부 회계제도과-56,2021.1.20.)」 및 서울시 「2021년 신속집행 추진계획(예산담당관-1849,2021.2.15.)」에 의거 긴급입찰 시행코자 함.

붙  임:  1. 설계 내역서 및 물량산출서 각1부.

2. 긴급공고 사유서 1부.  끝.