문서번호	도로계획과-16725
결재일자	2021. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	간선도로계획팀장		도로계획과장		안전총괄관		안전총괄실장
이승헌	代이주영		권완택		박진순		12/29 한제현
협 조
	중부공원녹지사업소장					김인숙
	토목부장					임춘근
	주무관					정유빈

「율곡로 창경궁 앞 도로구조 개선공사」

사업 추진계획 검토보고

2021. 12.

안 전 총 괄 실

[도로계획과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」

사업 추진계획 검토보고

'22년 3월 개방을 목표로 추진 중인 ‘율곡로 도로구조 개선공사’의 사업기간, 총사업비, 유지관리방안 등 사업계획에 대한 검토보고임.

Ⅰ		사업개요 및 추진현황

□ 사업개요

○ 위    치 : 종로구 율곡로 창덕궁교차로 ~ 원남동사거리

○ 사업내용

- (도  로) 도로확장 폭 4 → 6차로, 연장 810m(터널 320m 포함)

- (문화재) 종묘·창경궁 간 담장 복원, 보행로 조성, 북신문 설치 등

○ 사업기간 : 2008. ~ 2021.12.

○ 총사업비 : 85,370백만원

- *************************

- *********************************************

< 위 치 도 >

□ 주요 추진현황

○ [계획수립] 2002.9월 도로구조 개선 방침 수립(부시장방침 제85호)

○ [기본설계] 2003.5월~12월(문화재청 협의 결과에 따라 타절 준공)

○ [재 추 진] 2008.2월 율곡로 구조개선 검토보고(시장지시 제224호 관련)

○ [투자심사] 2008.7월 최초 투자심사, 2010.3월 재심사

- '08.07.09. : 최초심사(조건부 추진, 총사업비 48,170백만원)

- '10.03.26, : 재심사(조건부 추진, 총사업비 85,370백만원)

○ [실시설계] 2009.2월~2010.5월

○ [시설결정] 2010.2월 도시계획시설(도로, 공원) 최초 결정(5회 변경 결정)

○ [실시계획] 2010.8월 실시계획 최초 고시(9회 변경 고시)

○ [공사시행] 2010.10월 착공 ~ 2021.12월 현재 공정률 89%

- 문화재 현상변경 심의 18차례 시행('21.9월 최종 완료)

- '21.09.30. : 터널 6차로 전면 개통('19.12월 터널 5차로 임시개통)

Ⅱ		사업계획 검토

□ *******

○ ***********************************************************************

- ********************************************************************

⇒ **************************************

< 잔여 공사 내용 >

구 분	공사 내용	비 고
****	*********************	********** ************
****	*****************
****	***************

□ *******

○ *********************************************************************

⇒ *************************************

*********************************************************

< 총사업비 변경 총괄표 >

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
계	******	******	******
설 계 비	***	***	*
보 상 비	******	******	*****	******
공 사 비	******	******	******
감 리 비	*****	*****	***

< 세부 변경 내역 >

연번	구 분	내 용	사 업 비 (백만원)		비 고
*******			******
1	**** **	************************	*****	******	*** **
		*******************	*****
		******************	*****
		****************************	*****
		*************************	*****
		************************	***
2	***** **** **	*******************	***	*****
		**************	***
		************	*****
3	***	*******	***	***

□ ***************

○ *********************************

⇒ ***************************

○ *******************************

⇒ ******************

○ *************************************

⇒ ********************

< 시설물 위치도 >

**************

Ⅳ		향후 조치계획

□ **********

○ ***************************************

< 연차별 투자계획 >

(단위 : 백만원)

****	****	*****	*****	*****	*****
*	******	******	*****	*****	*****
*****	***	***	*	*	*
*****	******	******	*	*****	*
*****	******	******	*****	*****	*****
*****	*****	*****	***	***	*

□ ***********

○ ****************************************************************

********

- *****************************

- **************************************************************

⇒ *******************************

□ ********

○ ******************************************************

※ ********************************************************

○ ******************************

○ *************************************

*********************************************************************************

************************

Ⅴ		향후일정

○ *******************************

< 예정 공정표 >

*****	*******			*******			*******			*******
*****
******
*****
******

(****)

(****)

(************)

(**)

(***)

(****)

○ ***************

붙임 : 1. 설계변경 검토 보고(공사기간 연장) 1부.
2. 사업계획(총사업비) 변경 검토 보고 1부.
3. 율곡로 터널상부 보행로 유지관리주체 알림 1부.  끝.