문서번호	건축부-21261
결재일자	2021. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김성권		정채문	12/29 신명승
협조

『AI지원센터 건립공사』

가시설공사 변경에 따른 검토보고

2021. 12.

도시기반시설본부

건  축  부

『AI지원센터 건립공사』

가시설공사 변경에 따른 검토보고

***************************************************************************************************

※ 관련근거 : 근정 제2021-0290호(21.12.13) 캡빔 콘크리트 변경시공 실정보고

근정 제2021-0295호(21.12.16) 복공판 신설에 따른 실정보고

근정 제2021-0280호(21.12.9) 평판재하 및 정재하 시험계획서

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 서초구 태봉로 108

○ 규    모 : 지하1층, 지상7층, 연면적 10,020.05㎡(증축)

○ 용    도 : 교육연구시설

○ 총사업비 : ********* (공사비 ***** 설계비 14.3 감리비 ***** 시설부대비******

○ 감 리 자 : (주)종합건축사사무소 근정 외 2

○ 시 공 자 : 대라수건설(주)

○ 공사기간 : (총차) ‘21. 5. 14. ~ ’23. 4. 13.
(1 차) ‘21. 5. 14. ~ ‘22. 5. 13.(착공일로부터 1년)

Ⅱ		보고(검토)내용

********************

*********************************************************************************

***********************************************************************

*************************

******************************************************************************

****************************************************************************

*******************

********************************************************************************************

Ⅲ		감리단 및 설계사 의견

○ 캡빔은 지하층 골조공사 및 발수공사 간의 간섭으로 지하층 공조공사 완료후 철거시 발생하는 진동이 지하츨 공조에 영향을 초래하고, 상부 조경이 가능토록 하기 위하여는 캡빔을 대체시설로 시공함이 타당

○ 지하공사 및 잔토 반출시 원할한 장비 동선확보 및 도로점용에 따른 민원발생을 해소하기 위하여는 출입구 부근에 복공설치는 타당함

○ 기초의 지지력 확인을 위한 재하시험은 장기적으로 건물의 구조적 안정성 확보를 위한 방안으로 시험시행은 적정하다고 판단됩니다.

Ⅳ		공사비 증감 현황

○ 공사비 증·감 주요공종

- 캡빔 미시공 및 대체 시설물 설치에 따른 공사비 변경(감소)

- 안전사고 예방 및 시공의 효율성 향상을 위한 복공설치(증가)

- 설계에 반영된 지내력 확인을 위한 재하시험 시행(증가)

○ 공사비 및 감리비 산출현황

공 종	금 액(원)		증 · 감	비고
	당 초	변 경
C I P(캡빔)	***********	***********	***********
가시설 공사	*************	*************	************	********
재 하 시 험	*	*********	***********	**
계	*************	*************	*************

※계약 물량 증가분 및 신규공종은 협의율(91.25%)을 적용함

Ⅴ		검 토 결 과

****************************************************************************

**************************************************************************************************.

Ⅵ		검토자 의견

*****************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************

따로붙임 : 캡빔,복공판,지지력 시험 실정보고 각 1부.  끝.