문서번호	기후변화대응과-17605
결재일자	2021. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	전기차충전기획팀장	기후변화대응과장
이미주	정재현	12/29 김정선

2021년 급·완속충전기 설치지원사업 사고이월 계획(수정)

2021. 12.

급․완속충전기 설치지원사업 사고이월 계획

2021년 급·완속충전기 민간보조사업과 관련하여 준공 및 검수 지연 등의 사유로 연내 지급이 불가한 보조금에 대해 사고이월 처리하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2021년 급·완속충전기 설치·운영 지원사업

○ 총사업비 : ********

○ 진행절차

보조사업자 선정		협약체결 및 충전기 설치		완료보고 및 보조금 신청		현장점검 및 플랫폼 연동 확인		준공승인 및 보조금지급
보조금심의위원회 (7월)		서울시↔보조사업자 (8~11월)		보조사업자→서울시 (12월)		서울시 (12월~’22.1월)		서울시→보조사업자 (’22.1월)

○ 진행현황

(2021.12.20.기준, 단위:기)

구분	총 수량		준공완료		연내추가준공(예상)		준공지연(예상)
종류	급속	완속	급속	완속	급속	완속	급속	완속
수량	**	***	**	**	**	**	**	**

□ 사고이월 내역

○ 이월대상 : *********************

○ 세부내역

연번	업체명	급속	완속	계	보조금액(천원)
**		***	****	****	*********
*	****	***	***	***	*******
*	*****	***	***	***	*******
*	******	***	***	***	*******
*	****	***	***	***	*******

○ 예산과목

- 기후환경본부 기후변화대응과, 기후변화 총괄 대응, 친환경차량 보급, 전기차 충전인프라 구축, 민간자본이전, 민간자본사업보조(자체재원)

□ 사고이월 사유

○ 서울시 충전기 관리 통합 플랫폼 구축 지연

- 보조금 지급을 위해서는 충전기와 플랫폼 간 데이터 연계 확인이 필요하나 플랫폼 시스템 구축 지연으로 연내 데이터 연계 어려움

○ 연말 준공 물량 집중으로 현장 검수 시간 부족

- 보조금 지급을 위해 준공된 충전기에 대한 현장 검수가 필요하나 다수 물량이 연말에 설치 완료 예정임에 따라 연내 현장 점검이 어려움

○ 일부 설치 장소 공사 지연

-  인입공사 일정 및 전기안전검사 지연으로 인하여 연내 준공이 어려운 충전기 존재

□ 향후계획

○ 지방재정관리시스템(e호조) 이월요구 등록        :    ’21.12.31.

○ 충전기 검수 및 시스템 연동 완료 후 보조금 지급 : ~’22.1.30.

붙임  2021 급·완속충전기 설치·운영 지원사업 협약서 각 1부.  끝.