보고서(공사기간 연기)

주무관	급수관리팀장	급수운영과장		결재
박상권	代박상권	12/29 代서은교
협 조

문서번호 :	급수운영과-21720

도봉노원구관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사 감독업무 수행중 ***** 시설물 보수 작업기간 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2021. 12.  .

보고자 : ********************

제목 : 공사기간 연기 보고

□ 공사현황

연번	주소	공사기간	지시번호	비고
1	*****	2021. 12. 7.~2021. 12. 31.	시설물보수 -1,2,3

□ 연기요청사항

연번	주소	연기요청 사유	공사연기 기간
1	*****	동절기로 인한 공사연기	착공 ~ 2022.1.30.

□ 검토결과

○ 상기 위치에 대하여 일정 재협의로 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	당초 공사기간	변경 공사기간
1	*****	2021.12. 7. ~ 2021.12.31.	2021.12. 7. ~ 2022. 1.30.

□ 귀책사유 : 북부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 1) 공사기간 연기원 1부.  끝.