투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 및 변경계약의뢰(21/22년 제설작업 민간위탁용역-강서)

1. 우리사업소에서 시행중인 ’21/’22년제설작업 민간위탁용역(장기계속)에 대하여 아래와 같이 설계변경시행 및 변경계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: ’21/’22년 제설작업 민간위탁용역(장기계속)-강서

나. 용역개요: 제설장비 대기 및 제설작업

다. 용역기간:: 2021.11.11.~2022.03.15.

라. 도 급 자: ************

마. 변경사유: 제설재 전진기지 이동작업 및 실 제설작업일 반영

바. 변경내역

- 총차분                                                    (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부가세	**********	**********	************
	계	***********	***********	************

- 1차분                                                    (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	***********	***********	*************
	부가세	**********	**********	*************
	계	***********	***********	*************

- 2차분                                                    (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	***********	***********	-
	부가세	**********	**********	-
	계	***********	***********	-

사. 예산 과목

(단위 : 원)

예산과목	당초	변경	증·감	비고
*****	***********	***********	*	*****
*******	*	**********	************	*****
*	***********	***********	************

1) 예산과목 : 강서도로사업소 도로보수과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 제설대책추진, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 안전총괄실 도로관리과)

2) 예산과목 : 안전총괄과, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방, 사무관리비(재난관리기금 재난계정)

붙임  1. 설계변경 방침서  1부.

2. 변경설계서(총차,1차,2차)  1부.

3. 합의각서 2부.

	도로보수과장
주무관	박세준		도로보수과장	12/24 한정환
협조자
시행	도로보수과-7672	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 강서구 양천로 237	/
전화	02-2657-7941	/전송	02-2657-7960	/	sejun486@seoul.go.kr	/	부분공개(7)