투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(가시설 및 사토장 변경에 따른 실정보고 승인)

1.업무지시현장 : AI지원센터 건립공사(장기1차) (주)종합건축사사무소근정, AI지원센터

건립공사(장기1차) 대라수건설 주식회사

2.작 성 일 자 : 2021-12-30 11:12:37

3.지 시 내 용

1).건축부-21261(2021.12.29)호와 관련임.

2).위 호와 관련 캡빔변경, 복공판 설치, 재하시험에 대하여 승인코자 하오니 관련 업무에 참고하시기 바라며, 특히 복공판은 설치시 및 운영중에는 낙하물에 의한 안전사고가 발생할 위험이 높으므로 시공중 및 운영중에는 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다

3).또한 사토장 추가선정(근정 제2021-0306호)은 시공중 발생토사의 원할한 처리를 및 예상되는 문제점을 사전에 해소할수 있는 방안으로 사료되어 승인코자 하오니 사토장 관리 및 반출에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 실정보고 검토보고 1부.  끝.

주무관							김성권			건축부장					12/30 신명승
협조자				주무관						김예림
시행			건축부-21377									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2648						/전송			02-3708-2659					/	sssggk@seoul.go.kr												/	대시민공개