등록번호

도시재생과-10468

주무관

천연충현도시재생팀장

도시재생과장

도시재생국장

등록일자

2021.12.29.

임병수

백종필

염봉선

12/30

박성주

결재일자

2021.12.30.

공개구분

부분공개(5)

협  조

예산팀장

기민희

주차관리팀장

유선환

사고이월 계획(영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성)

서 대 문 구

도시재생과

사고이월 계획(영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성)

『영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성』설계용역 준공 지연 및 이설 등 사전절차로 인해 공사 착공이 늦어짐에 따라 연내 공사비 집행이 불가하여 내년도 예산집행을 위하여 사고이월 하고자 함

Ⅰ		추진근거

■ 천연충현 국토부 도시재생 뉴딜사업 선정(2018.8)

■ 2019 중소벤처기업부 주차환경개선사업 공모 선정  중소벤처기업부 시장상권과 -1353호(2019.5.7.), 서울특별시소상공인정책담당관-6388호(2019.5.8.)

■ 영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장조성계획(안) 도시재생과-3827호(2019.5.17.)

Ⅱ		사업개요

■ 사 업 명 : 영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성사업

■ 위    치 : 영천동 263번지 일대

■ 사업기간 : 2020. 1. 30.~2023. 5. 31.

■ 사업내용 : 지하공영주차장 및 교통정보센터 건립, 문화공원 리모델링

■ 사 업 비 : 금17,098백만원(국 7,200 / 시 6,538 / 구 3,360)

※ 도시재생뉴딜사업비(시비) 포함임 [공원조성비] : 금1,498백만원

사 업 명	사업기간	재 원	금 액	비 고
독립문 문화공원 지하공영주차장 조성 사업	2021.12.30. ~2021.05.31.	주차장특별회계 (교통관리과)	15,600,000,000원	국·시·구비 매칭
		도시재생뉴딜사업비 (도시재생과)	1,498,000,000원	2022년 명시이월 예산 (시비)

Ⅲ		추진경과

■ 독립문 문화공원 지하주차장 조성 사업 추진경과

❍ 2020. 01. : 독립문 문화공원 지하주차장 기본 및 실시설계 용역 시행

❍ 2020. 12. : 서울시 설계경제성(VE) 심의 통과

❍ 2020. 12. : 현상변경 허가 문화재청 문화재위원회 심의 조건부 통과

❍ 2021. 04. : 서울특별시 건설기술심의(시 기술심사담당관) 통과

❍ 2021. 06. : 독립문 교통정보센터 신축이전 공사 우선 발주

❍ 2021. 07. : 소규모 지하안전영향평가 협의 최종 통과

❍ 2021. 09. : 독립문 문화공원 시유지 사용 시-구 최종 협약 체결

❍ 2021. 09. : 독립문 문화공원 지하매설물 이설 유관기관 협의

❍ 2021. 10. : 독립문 문화공원 지하매설물 이설 공사(상·하수도 일부)

❍ 2021. 10. : 서울특별시 계약심사 및 일상감사 통과

❍ 2021. 11. : 구 계약심의위원회 통과

❍ 2021. 11. : 독립문 문화공원 지하공영주차장 건립 공사 입찰공고

❍ 2021. 12. : 독립문 문화공원 지하공영주차장 건립 공사 낙찰(예정)

Ⅳ		사고이월 세부현황

■ 사고이월액 : 금6,699,102,530원

■ 예산과목

❍ 시설비 : 교통관리과/주차질서 확립 및 주차난 해소/주차장 확충 및
야간개방(주차장특별회계)/영천시장(독립문어린이공원)
지하주차장 조성/시설비및부대비/시설비 [명시이월]

❍ 감리비 : 교통관리과/주차질서 확립 및 주차난 해소/주차장 확충 및
야간개방(주차장특별회계)/영천시장(독립문어린이공원)
지하주차장 조성/시설비및부대비/감리비 [명시이월]

❍ 시설부대비 : 교통관리과/주차질서 확립 및 주차난 해소/주차장 확충 및
야간개방(주차장특별회계)/영천시장(독립문어린이공원)
지하주차장 조성/시설비및부대비/시설부대비 [명시이월]

■ 세부현황

❍ 이월내역

(단위: 원)

통계목	예산현액	집행액	사고이월액			비 고
			원인행위(필)	원인행위(미필)	소 계
시설비 (명시이월)	6,442,600,000 국비 3,600,000,000 시비 2,520,000,000 구비 322,600,000	395,193,270	5,925,917,990	121,488,740	6,047,406,730
감리비 (명시이월)	1,324,000,000 전액구비	422,400,000	633,600,000	0	633,600,000
시설부대비 (명시이월)	23,625,000 전액구비	5,129,200		18,095,800	18,095,800

❍ 이월사유

- 본 사업은 설계 관련 행정절차 이행과정에서 시유지 사용 협약 등 기간을 예측불가능한 과제와 상급기관 심의로 인하여 설계기간이 연장되었고 각종 지하매설물 이설 공사 및 안전진단 등 과업이 추가됨에 따라 2021년말 공사에 착수하게 된바 금년내 대금집행이 불가하여 내년도에 예산을 집행할 수 있도록 사고이월 하고자 함.

Ⅴ		향후 추진계획

2021. 12. 30. : 공사 착공

붙임 : 1. 사고이월요구서 1부.
2. 세부사업별 명세서 1부.  끝.