문서번호	도시철도토목부-11081
결재일자	2018.9.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	궤도과장	도시철도토목부장		도시철도국장
조규양	최진규	정대현		09/12 박상돈
협 조	주무관		노권호
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

발주계획 검토(5차)

2018. 9.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

발주계획 검토(5차)

우리본부에서 시행하고 있는『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』5차분 발주계획에 대한 검토 보고임.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사규모 : 총 연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015.05.30.~2020.12.31.

○ 도 급 액 : 76,887백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주)외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		계약 및 발주현황

(단위 : 백만원)

구 분		총 괄	기 준공 (1~3차)	기발주 (4차)	금회 발주 (5차)	잔여분
공사비	계	82,759 (100%)	32,383 (39.13%)	17,976 (21.72%)	2,500 (3.02%)	29,900 (36.13%)
	도급비	76,887	31,177	16,137	2,500	27,073
	관급비	5,872	1,206	1,839	-	2,827
공사기간		`15.05.30 ~`19.03.28	`15.05.30 ~`17.12.31	`18.01.01 ~`18.12.30	착공일 ~`18.12.31	-

3		발주(5차공사) 계획

○ 공사기간 : 착공일로부터 ‘18.12.31.까지

○ 발주금액 : 2,500백만원(도급비)

〈 공종별 발주금액 〉

(단위 : 백만원)

구 분	총괄금액	발 주 금 액				잔여분
		기 준공 (1~3차)	기회 발주 (4차)	금회발주 (5차)	소 계
1.토 목	50,048	23,655	11,527	1,712	36,894	13,154
1.1 가설공	1,865	1,061	293	14	1,368	497
1.2 본선	8,431	4,662	2,609	332	7,603	828
1.3 본선터널	4,524	1,936	2,079	-	4,015	509
1.4 정거장	27,077	13,623	4,674	545	18,842	8,235
1.5 본선환기구	4,140	1,752	794	803	3,349	791
1.6 차량기지 입출고선	111	-	111	-	111	-
1.7 고덕천교	2,378	347	864	18	1,229	1,149
1.8 도로복구공	369	13	-	-	13	356
1.9 조경공사	446	137	-	-	137	309
1.10 도급자 지장물이설비	707	124	103	-	227	480
2.건축	3,915	-	-	-	-	3,915
3.전기	51	-	7	44	51	-
4.설비	36	-	28	7	35	-
직접공사비 계	54,050	23,655	11,562	1,763	36,980	17,069
간접공사비	18,008	7,039	3,706	592	11,337	6,672
제요율제외 및 PS공종	1,416	140	-12	-	128	1,288
물가변동(1회,2회)	3,413	343	881	145	1,369	2,044
도 급 금 액	76,887	31,177	16,137	2,500	49,814	27,073
관 급 자 재	5,872	1,206	1,839	-	3,045	2,827
총 공 사 금 액	82,759	32,383	17,976	2,500	52,859	29,900

〈 5차 공사내용 〉

(단위 : 백만원)

구 분		공종 및 수량	금 액	추 진 내 용
토목	가설공	■ 재해대책비 : 1년 ■ 지하관정수질 모니터링비	14	■ 지하관정수질 모니터링 외
	본 선	■ 되메우기 : 6,587㎥ ■ 가시설 띠장철거 : 762m ■ 버팀보 철거 : 63본 ■ 주형보 철거 : 10본 등	332	■ 본선1구간 - 하수박스 복구(40m) 되메우기 및 노체시공 ■ 본선2구간 - 가시설 철거, 노체 및 노상 시공
	정거장	■ 콘크리트 타설 : 1,500㎥ ■ 거푸집 설치 : 913㎡ ■ 방수공 : 1,700㎡ ■ 측벽 되메우기 : 1,000㎥	545	■ 구조물 타설 - 1Span 완료, 2Span 1층, 3Span 2층, 4Span 2층, 5Span 2층, 6Span 2층
	환기구	■ 콘크리트 타설 : 2,606㎥ ■ 거푸집 설치 : 3,888㎡	803	■ 환기구#1,#2 : 본선 구조물 완료
	고덕천교	■ 교량배수시설 - 집수구 18개소, 직관 63m	18	■ 교량 배수시설 등
	전기·설비	■ 본선터널 전선관 설치 ■ 본선터널 임시환기설비 외	51	■ 터널 임시시설
직접공사비 계			1,763
제경비, 물가변동			737
도급금액			2,500
도급자설치 관급자재			-
관급자설치 관급자재			-
총공사비			2,500

4		공사관련자 현황

구 분	소 속	직 명	성 명
설 계 자	(주)동일기술공사	책임건설사업관리자	홍 춘 선
심 사 자	(주)신성엔지니어링	기술지원 건설사업관리기술자	남 기 천
확 인 자	(주)동일기술공사	대표이사	황 주 환
지원업무 수 행 자	도시기반시설본부	도시철도토목부 공사관리관	조 규 양

5		관리단 검토의견

○ 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사(5차) 발주설계서는 ‘18년 공사계획 수립 및 추가 예산에 따른 금차(5차) 세부예정공정표에 의하여 물량 및 공사비를 산정하였으며,

○ 공사기간은 ‘18.9월 계약일로부터  ‘18.12.31.까지로 적정하다고 판단됨.

6		조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 5차 공사를 발주하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 관리단 공문 및 검토의견서 1 부.

2. 발주설계서 1 부.

3. 수량산출서 1 부.

4. 발주 요약서 1 부.

5. 예정공정표 1 부.

6. 발주도면 1 부.  끝.