문서번호	도시철도토목부-11332
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	09/19 정대현
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

현안사항 검토회의 결과

2018. 09.

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

현안사항 검토회의 결과

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』기존 5호선 벽체 철거 관련 서울교통공사와 현안사항 검토회의를 시행하고 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 안    건 : ***********************

○ 일    시 : ‘18.09.11.(화) 14:00~

○ 장    소 : 하남선 1-1공구 현장상황실

○ 참 석 자

- 본        부 : 궤도과장, 업무담당

- 서울교통공사 : 토목2사업소장, 업무담당(토목처, 토목2사업소)

- 현        장 : 감리단장, 현장소장

□ 회의내용

○ 작업시간 연장 가능여부

〔 본  부 〕

- 현재 작업시간은 2.5시간 정도(01:30~04:00/현장정리 및 철수 포함)로서 공기단축을 위해 열차운행이 없고 안전에 지장이 없는 시간대(10:00~17:00) 코아천공 및 절단 등 일부작업이 반드시 필요함

※ 시점부는 하남선 1단계 전체 CP(critical path)로서 격주 개최되는 국토부, 서울시, 경기도 합동공정회의 시 중점관리대상이며 서울교통공사에서 적극적인 협조가 필요함

〔 서울교통공사 〕

- 입출고선 운행에 대하여 승무시스템처와 문서로 협의하기 바라며 철거로 인해 운행선에 개방되는 구간은 반드시 차단하기 바람

○ 기존벽체 철거 후 신설구조물 연결방안

〔 본  부 〕

- 기존 철근과 신설 철근 연결을 위해 기존 도상con’c 파쇄(공사 궤도처 미협의) 후 연결하는 신구철근을 미연결 가능한지

〔 서울교통공사 〕

- 신구철근 연결은 기존 협의사항이며 설계검토 후 재협의

○ 벽체 철거 후 경량칸막이(불연성 판넬) 설치

〔 본  부 〕

- 야간작업시간 내 경량칸막이 설치가 어려움

가설칸막이(파이프＋부직포) 설치하고 현장내부에 CCTV 설치 가능한지

〔 서울교통공사 〕

- 칸막이 재질에 상관없이 완전차단 필요함

○ 기존 5호선 침수 대비 차수벽 설치

〔 본  부 〕

- 외수 유입으로 운행중인 5호선이 침수가 되지 않도록 개구부를 관리하겠으며, 토목공사 완료 후 단계적으로 시행되는 궤도 및 시스템분야 작업을 위해 터널내 차수벽은 최소화, 일시적으로 시행 필요함

위치	시점부 (-0k015)	출고선 분기 (0k100)	집수정 (0k660)	시계 (1k099)	역사공원 (1k280)	H2정거장 (2k081)
E.L	107.294	107.626	105.972	107.279	107.500	105.080
구배
비고	-0.332	차수벽위치	-1.654	-0.347	-0.126	-2.546

〔 서울교통공사 〕

- 공사중 철저한 개구부 관리가 필요함

○ 벽체 철거구간 안전점검 시행

- 9월중 철거 전 안전점검 시행하겠음

○ ***********************

****************************

○ 시점부 KT 통신구 협의주체

- 서울시에서 설계완료되는 ‘18.09월중 KT와 협의하고 공사에 제출하겠음

□ 조치의견

○ ************************************************************************

회의사진

끝.